투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	"중랑천 상류 차집관거 성능개선공사" 외 1건 준공기한 연기

우리센터에서 추진 중에 있는 “중랑천상류 차집관거 성능개선공사”외 1건에 대하여 절대공기 부족으로 인한 준공기한을 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다

가. 계 약 자

계 약 명	계 약 자	계약금액(원)	연 기 기 한	비 고
중랑천 상류 차집관거 성능개선공사(장기계속)	성일건설(주) 대표 황윤성	1,710,225,000	당초 : 2016.06.25 변경 : 2016.12.25
중랑천상류 차집관거 성능개선공사 건설폐기물 처리용역	삼흥산업개발(주) 대표 염태욱	75,888,000	당초 : 2016.06.25 변경 : 2016.12.25

나. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임. 방침서 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	정재형		시설보수과장	06/23 강병수
협조자
시행	시설보수과-3005	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2577	/전송	02-2211-2577	/	isa1542@seoul.go.kr	/	부분공개(5)