서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	(주)이산 외 2개사 대표이사님
(경유)
제목	추가 과업지시

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사와 우리시가 2016.4.15. 계약체결하여 시행중인 아래 용역에 대하여 추가 과업지시하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

1) 용역명 : 차집관로 성능개선 기본 및 실시설계 용역

2) 개  요 : 차집관로 기본 및 실시설계(1.5Q 미만) 11.2Km, 기타

3) 기  간 : 2016.4.20.~2017.10.11

4) 용역사 : ㈜이산 외 2개사

나. 추가 과업내용(붙임 세부내용 참고)

1) 개봉유수지(구로구) 유입 오수량(1~3Q) 검토 후 차집관로 관경 검토

※ 붙임 관련부서 협의회신 내용 참고

2) 개봉유수지(구로구) 주변 기존 개수로를 지하 차집관로화 및 목감천

차집관로 연결방안 비교, 우수토실 개선방안 등(측량 및 실시설계)

3) 개봉유수지 주변 악취방지 방안 검토

4) 2020(2009.6) 및 2030 하수도정비기본계획(안) 오수량 등 제반 관련

자료 검토, 차집관거 성능개선 기본 및 실시설계 용역(2013.8, 탄천,

서남) 자료 검토 등

5) 관련부서(물재생계획과,하천관리과,구로구 치수과 등) 협의 등

붙임 : 1. 개봉유수지 내 차집관로 설치공사 계획서(구로구) 1부.

2. 관련부서(물재생계획과,하천관리과) 협의회신 내용 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박만헌		주무관	강청금		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	06/23 이철해
협조자
시행	물재생시설과-8905	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (물재생시설과 - 서소문청사 1동 8층)	/
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	parkmjr@seoul.go.kr	/	대시민공개