문서번호	시설관리과-14622
결재일자	2016.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설관리과장
윤복철	06/23 박희철

현장실정 보고사항 조치계획 보고

「2016년 서초구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사」와 관련하여 작업지시(배가-4번)건에 대해서 감리업체로 부터 현장 실정보고서가 접수되어 다음과 같이 처리코자 보고함.

□ 현 황

○ 공사개요

- 공사명 : 2016년 서초구관내 상수도시설물설치 및 보수공사(연간단가)

- 계약자 : ㈜태령건설  대표자 정 권 우

- 계약기간 : 2016. 5. 4 ~ 2017. 4. 30

○ 공사감리업체

- 감리사 : ㈜이준엔지니어링 대표 나석근 (감독대행자 황영수)

□ 작업지시 및 실정보고내용

○ 작업지시 사항(지시번호 배가-4)

- 국민단지 증압장 맨홀(사각) 노후 및 빗물유입 원형철개로 교체 작업지시

- 공사기간 : ‘16. 5. 17 ~ 5. 30 (변경 : ‘16. 5. 30 ~ 6. 30)

○ 감리업체 실정보고내용

- 노후 맨홀(사각)이 콘크리트 구조물 상단에 지지대가 없고, 구조물 상단을 파쇄하여 장대 등 지지대를 설치하여 원형변실로 교체하여야 하나

- 작업구간이 차량 통행이 많고 좁은 외길로서 장시간(2일) 차량을 통제 등 민원발생으로 원형철개로 교체가 어러운 실정인 바,

- 단시간에 현장에 설치할 수 있고 증압장 유지보수시 장비와 사람이 변실내부로 출입이 가능한 사각맨홀로 견고하게 제작 설치 하여야 할 실정임.

- 공사기간이 주변 교통상황 조사와 차량 민원해결에 다소 시일이 소요되고 자재구매 제작에 시일이 소요되어 부득이 공사기간을 연기 하여야 할 실정임.

○ 현황 사진

국민단지증압장 주변도로	증압장 맨홀(사각)	증압장 맨홀 내부

□ 조치계획

○ 상기 실정보고 내용과 같이 현장 여건상 원형철개 교체가 어려운 실정으로 재질이 견고하고 소음이 발생하지 않은 맨홀제작(사각)하여 교체토록 하고,

○ 공사기간이 장시간 소요되어 공사기간(5.30까지)을 6월 30일까지 연기하여 작업시행코자 함.

따로붙임 : 감리업체 현장실정보고서 1부.  끝.