문서번호	운영과-2143
결재일자	2016.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	주무관	운영과장		난지물재생센터소장
이진호	김지응	김웅남		06/23 최홍식
협 조

안전하고 행복한 물환경 도시 서울

『슬러지소각시설』

2016년도 상반기 대수선 기간 변경시행

2016. 6.

서울틀별시 난지물재생센터

(운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등		□

『슬러지소각시설』

2016년도 상반기 대수선 기간 변경시행

수도권매립지 슬러지처리시설(2단계)정비에 따른 우리센터 슬러지 반입량이 감소됨에 따라 슬러지소각시설 ‘16년 상반기 대수선기간을 변경 시행코저 함

▷ (당초) ‘16.6.28 ~ 7.24 → (변경) ’16.7.3 ~ 7.29

변경개요

❍ 대수선기간

- 당초계획 :  ‘16.6.28 ~ 7.24

- 변경계획 :  ‘16.7.03 ~7.29

❍ 변경사유

- 수도권매립지 슬러지처리시설(2단계)정비로 우리센터 슬러지 반입량이 감소됨에 따라 소각시설 상반기 대수선 일정을 수도권매립지 정비기간 이후로 변경하여 센터내 슬러지 적치량 최소화

․ 수도권매립지 정비기간 : 6.24 ~ 6.30

․ 슬러지 반출 배차량    : 12대 → 4~5대로 감소

조치의견

❍ 슬러지소각시설 상반기 대수선일정 변경에 따라 소각시설 대수선시 병행 시행 예정인 단위사업 준공기한 연기

- 계 약 명 : 원심력 반응집진기 제작구매 설치

- 계약기간 : (당초) 5.17 ~ 7.16 → (변경) 5.17 ~ 7.31

- 변경사유 : 원심력 반응집진기는 상반기 대수선이 완료되어 소각시설이 정상가동된후 설비 이상유무에 대해 확인이 가능하므로 대수선이후로 계약기간 변경시행.  끝.