문서번호	방재시설부-9601
결재일자	2016.6.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	방재시설부장
조양연		조성만	06/23 임춘근
협조	건축관리과장		곽동호
	열빛총괄과장		유병기

『중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 전면책임감리용역』

설계변경(총괄13회, 9차 1회) 검토보고

2016. 6.23.

도시기반시설본부

(방재시설부)

『중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 전면책임감리용역』

설계변경(총괄13회, 9차 1회) 검토보고

「중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 전면책임감리용역」 관련, 물가변동으로 인한 계약금액 조정과 이에 따른 감리원 배치계획 조정으로 인한 설계변경(총괄13회, 9차 1회, ) 검토 보고임.

□ 용역개요

□ 용 역 명 : 중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 전면책임감리용역

□ 감 리 사 : ㈜한국종합기술, ㈜제일엔지니어링

□ 용역기간 : 총괄 - ′08.11.10 ~ ′17.5.31( 9차  ′15.012.24 ~ ′16.12.23)

※ 공사기간 : 2009.  2. 13. ~ 20167. 4. 28.

□ 계약금액 : 총괄 8,577,200천원(9차 875,200천원)

□ 설계변경 검토내용

[총괄 설계변경]

□  물가변동으로 인한 계약금액 조정【증 216,700천원】

- 제4회 물가변동(5.94%)으로 인한 계약금액 조정(증 67,100천원)

- 총괄12회 설계변경(방재시설부-16836호)시 적용된 최초 계약단가에 대한 조정단가 반영(증 149,600천원)

※ 도시기반시설본부-16-4081호(2016.5.20.) 승인

□ 감리배치계획의 조정

- 공사예정공정표에 의거 조경감리원 배치기간 조정

(15.916개월 -> 10.042개월)

- 하수도과학관 전시홍보시설 설계변경 예정에 따른 건축감리원 배치기간 조정(40.632개월 → 44.632개월)

- 전력공급시설 공사와 관련하여 전기감리원(특급) 투입기간 조정

(5개월 -> 5.5개월)

[9차1회 설계변경]

□ 9차 계약금액(감18,000천원)조정

- 2016년에 계획한 감리비와 예산재배정 확정금액의 상이에 대해계약금액을 조정하고 감리기간을 조정 반영

875,200,000원 → 857,000,000원(감18,200,000원)

□ 물가변동 반영에 대한 감리배치계획 조정

- 9차에 대한 4회 ESC금액 48,500,000원 반영에 대한 감리         배치계획 변경【 감리배치기간을 조정하여 계약금액 조정없이 반영】

※ 직전조정기준일('12.01.01) 이후 설계변경(2015.12.17.)시 반영된  9차분 조정단가(물가변동반영) 112백만원은 다음 차수계약시 반영계획.

구 분	4회 ESC	최초계약단가의 조정단가 적용 (1~3회 ESC)	비고
총괄	67,100	149,600	증 216,700
9차	48,500	112,000

[감리 설계변경 증·감 내역]

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증ㆍ감
용역 금액	총괄	8,577,200	8,793,900	증 216,700
	9차	875,200	857,000	감 18,200
용역 기간	총괄	′08.11.10 ∼ ′17.5.31	′08.11.10 ∼ ′17.05.31	변경없음
	9차	′15.12.24 ∼ ′16.12.23	′15.12.24 ∼ ′16.12.08	감 11일

□ 조치 의견

□ 위 검토내용과 같이 물가변동으로 인한 계약금액 조정과 이에 따른 감리원 배치기간을 조정하는 설계변경을 시행

□ 9차 계약금액은 2016년 계획한 감리비와 예산재배정 확정금액이 상이함으로 이를 조정 계약

□ 물가변동에 따른 9차1회 설계변경은 감리배치계획을 조정하여 계약금액 조정없이 반영코자 함.

붙임  1) 감리용역(총괄 13회, 9차 1회) 설계변경 계약요청 1부.

2) 변경내역서(총괄 13회) 1부.

3) 변경내역서(9차 1회) 1부.  끝.