문서번호	시설과-4109
결재일자	2016.6.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	추진반장	관리부장	서울대공원장
김용주	이승우	심상원	06/23 송천헌
협 조
	시설과장		공헌구

해양관 보수·보강공사 시행계획

2016. 6

(기반시설안전추진반)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

해양관 보수·보강공사 시행계획

해양관 리모델링 공사가 2020년 이후로 연기됨에 따라 시설물 노후로 인한 안전사고 위험부분에 대한 보수·보강공사를 시행하여 시설물 안전성확보 및 사육환경을 개선하고자 함

Ⅰ		근 거

□ 해양관 리모델링 추진방향 검토회의 결과보고(시설과-1081호, 2016.2.22.)

◯ 해양관 리모델링은 시설물 보수·보강후 돌고래 자연감소 이후 시행

Ⅱ		건축물 현황

□ 규    모 : 지하1층/지상2층, 연면적 4,584.33㎡, 외부방사장 2,347.87㎡

□ 준공연도 : 1983. 1

Ⅲ		보수·보강공사 대상

□ 건축분야

◯ 외부방사장 노후 그늘막 교체 및 사육환경 개선, 내부 사육시설 보수

◯ 주요 구조부 보강, 관람석 안전펜스설치

◯ 천장 석면텍스 교체 등

□ 기계분야

◯ 기계실 여과장치 및 배관교체

◯ 펌프 및 밸브류 교체

◯ 냉난방기 및 환기설비 설치 등

□ 전기분야

◯ 전기실 수배전반 교체 및 전력간선공사

◯ 동력설비공사, 케이블트레이 공사 등

Ⅳ		소 요 예 산

□ 합 계 : 2,757,317천원

◯ 설계용역비 : 115,037천원

- 건축분야 : 35,321천원

- 기계분야 : 61,700천원

- 전기분야 : 18,016천원

◯ 공사비 : 2,642,280천원

- 건축분야 :  678,000천원

- 기계분야 : 1,534,280천원

- 전기분야 :  430,000천원

Ⅴ		추 진 계 획

□ 해양관 리모델링 설계는 계약업체로 하여금 기본설계(계획설계, 중간설계)만 6월까지 완료하고 실시설계는 과업범위에서 제외, 보수·보강공사 설계 추가시행토록 추진

□ 보수·보강공사는 설계결과에 따라 올해 예산범위내에서 시행하고 부족분은 연차별로 예산 반영하여 공사 시행

Ⅵ		준공기한 연기

□ 연기일수 : 70일

□ 변경내역

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
용역기간	2015. 12. 28 ∼2016. 6. 24	2015. 12. 28 ∼ 2016. 9. 2	70일 연장

□ 준공기한 연기사유

◯ 해양관 보수·보강공사 설계용역 추가시행에 따른 연기

□ 지체상금 부과여부 : 미부과(귀책 : 서울대공원)

Ⅵ		향 후 계 획

□ 2016. 6 : 용역타당성 심사 및 계약

□ 2016. 9 : 설계용역 준공, 계약심사 및 공사발주

□ 2016. 10 ∼ 2017. 3 : 공사시행

붙임 : 1) 해양관 리모델링 추진방향 검토회의 결과보고 1부.

2) 보수·보강공사 및 설계용역비 산출내역 1부.