설계변경(2차) 심의 의견서

부분공개(6)

○ 용역명 : 2015년 강동구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역

신청 부서명	강동수도사업소 시설관리과
공사 감독원	지방시설주사보 윤기영
제출 년월일	2016. 06. 23.

□ 심의 위원회 의견

- 심의일시 : 2016. 06. 23(목) 13시

- 심의의견 : 설계변경에 따른 심의 결과에 대하여 아래와 같이	의견을 제시함.

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위 원 장

시설관리과장

남정열

06/23

남정열

타당함

위    원

주무관

송종범

송종범

타당함

위    원

주무관

김용현

김용현

타당함

위    원

주무관

한호진

한호진

타당함

위    원

★주무관

김주경

김주경

타당함

위    원

주무관

김효수

김효수

타당함

담    당

주무관

윤기영

윤기영

설계변경(2차) 심의 설명서

□ 용역현황

○ 용 역 명 : 2015년 강동구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역(단가계약)

○ 용역개요 : 당초 - 운반량 3,262㎥, 처리량 7,503톤

변경 - 운반량 2,438㎥, 처리량 717톤

○ 용역기간 : 2015. 5. 20. ~ 2016. 6. 30.

○ 용 역 비 : 당초 80,153,000원,  변경 57,757,000원

○ 계약상대자 : ㈜지솔알이에이치  대표 유 재 원

□ 설계변경 세부내용 및 사유

○ 계약물량 증․감사항 발생

- 폐아스콘 운반 : 당초 2,736㎥ → 변경 2,117㎥(감 619㎥)

- 폐콘크리트 운반 : 당초 300㎥ → 변경 290㎥(감 10㎥)

- 폐토사 운반 : 당초 226㎥ → 변경 31㎥(감 195㎥)

- 폐아스콘 처리(무대) : 당초 6,365㎥ → 변경 4,973㎥(감 1,392㎥)

- 폐아스콘 처리(유대) : 당초 64㎥ → 변경 0㎥(감 64㎥)

- 폐콘크리트 처리 : 당초 690㎥ → 변경 665㎥(감 25㎥)

- 폐토사 처리 : 당초 384㎥ → 변경 52㎥(감 332㎥)

□ 설계변경 및 차수별 부기금액 변경내용

○ 설계변경 내용                                     (단위 : 원)

구 분	당초 금액	변경 금액	비 고
총 용역비	80,153,000	57,757,000	감 22,396,000
용 역 비	80,153,000	57,757,000	감 22,396,000
관급비및기타	0	0	-

붙 임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.