투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	기성검사 통보[신사사거리~고양시계간 도로개설공사(4차8회, 개산급)]

1. 신명건설사업 2016-343호(2016.6.22.)와 관련입니다.

2. 『신사사거리~고양시계간 도로개설공사』기성검사(4차8회, 개산급)결과가 제출되어  통보하오니 대금지급 등이 아래 예산과목에서 이루어지도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 신사사거리~고양시계간 도로개설공사

나. 도 급 자 : 현대건설(주)

다. 공사기간 및 계약금액

- 총차 : 2012.12.27. ~ 2016.09.26.(금27,057,900,000원)

- 4 차 : 2015.07.01. ~ 2016.09.26.(금9,552,039,910원)

라. 기성금액(4차)

- 전회까지 기성금액   : 6,820,000,000원(71.40%)

- 금회(8회) 기성금액 : 1,656,000,000원(17.33%)

- 누계 기성금액      : 8,476,000,000원(88.73%)

마. 예산과목(4차 8회기성)

- 광역교통시설특별회계, 도시기반시설본부 토목부, 도로건설, 광역도로건설(광역교통시설특별회계), 신사사거리~고양시계간 도로개설, 시설비 (국비)

붙  임 : 1) 기성검사조서 1부.

2) 기성내역서 1부.  끝.

	토목부장
주무관	최종구		교량건설과장	代김동현		토목부장	06/23 김영수
협조자
시행	토목부-12853	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2577	/전송	02-3708-2599	/	cjg5905@seoul.go.kr	/	부분공개(5)