문서번호	시설과-3281
결재일자	2016.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
최종성	임록화	진병규	06/23 이춘희
협 조
	주무관		강희진

「개포디지털혁신파크」

옥상녹화·텃밭조성 실시설계 용역 준공 보고

2016. 6

동부공원녹지사업소

(시설과)

『개포디지털혁신파크』

옥상녹화·텃밭조성 실시설계 용역 준공 보고

개포디지털혁신파크 옥상녹화·텃밭조성 실시설계 용역이 완료되어 아래와 같이 보고 드림.

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 개포디지털혁신파크 옥상녹화·텃밭조성 실시설계 용역

○ 위    치 : 강남구 개포로 416

○ 사 업 비 : 234백만원

○ 면    적 : 668㎡

○ 용역기간 : 2016. 04. 11. ~ 2016. 06. 13.

○ 도 급 자 : 한수그린텍(주) 대표 김성주

○ 계약금액 : 금 12,5000,000원

□ 추진 경위

○ 2016.01.26 : 2016년 옥상녹화 텃밭조성 계획 시달(市조경과→동부공원녹지사업소)

○ 2016.01.27 : 옥상녹화사업 협약서 및 동의서 발송

○ 2016.02.05 : 기술용역 타당성 심사 결과 통보(적정)

○ 2016.02.19. ~03.19 : 건축물구조 안전진단 용역 시행

○ 2016.03.19 : 건축물 구조안전진단 용역 준공

○ 2016.03.23 : 실시설계 기술용역 타당성 심사 결과 통보

○ 2016.04.11 : 실시설계용역 착수

○ 2016.04.28 : 현장조사, 사전협의

○ 2016.05.03 : 중간보고

○ 2016.05.11 : 현장 보고

○ 2016.05.31 : (市)조경과 설계심의

○ 2016.06.07 : 설계심의 결과 통보

○ 2016.06.13 : 용역준공

□ 설계심의 결과

○ 일    시 : 2016. 5. 31.(화) 16시

○ 장    소 : 푸른도시국 회의실

○ 심의유형 : (市)조경과 설계심의

○ 심의내용

- 사업목적 및 취지의 적합성, 디자인 등 설계 전반 등

○ 주요내용

- 옥상녹화

심의 내용	조치사항
옥상녹화 옥외안내판(시 안내시설 제작요령 의거)을 건물 입구에 설치할 것	옥외안내판 설치 2개소 반영
동절기 경관을 고려하여 교목과 관목 등 상록성 수종과 수량의 비중을 높일 것.	상록성 둥근소나무 외 7종 647주 식재반영
난간에 배식된 장미는 옥상 식재지반 특성상 원활한 생육 등이 곤란할 수 있으므로, 적합한 식재기반 확보 또는 식재본수를 줄이거나 담쟁이덩굴 등 만경류와 혼식할 것.	옥상생육이 가능한 사계덩굴 장미를 반영하고, 줄사철, 담쟁이 덩굴과 혼식하여 계획
지피 수종별 우점도 등의 생육특성을 고려하여 경계재(Green Edge)를 설치할 것.	경계재 59m 반영
트랠리스와 난간에 덩굴성 식물을 배식하여 입체적으로 녹화할 것.	담쟁이 외 2종 926주 반영
녹지공간의 볼륨감 부여 등의 효과가 있는 억새, 모닝그라스, 염주그라스, 좀새풀 등의 사초류를 반영할 것.	억새 외 3종 115주 반영
공간의 위요감 제고와 녹지보호 등을 위해 휴게와 녹지공간(주열:X4, Y2~3) 사이에 트랠리스를 설치할 것.	트랠리스 H:1m x L: 7.5m 반영
방부․건조 등 목재품질에 대한 사항을 철저히 확인할 것.	시방서 반영 및 시공시 철저 확인
방수공사(보수포함)에 대한 누수문제는 전적으로 방수공사를 시행한 업체의 책임임을 명시할 것. (권장사항 : 10년간의 방수 보증을 받을 것)	시방서 반영
공사 착공 전 기 구조안전진단을 실시한 업체로부터 설계 내용에 대한 안전성 검토 확인(담당자)을 받고 관련 도서를 제출할 것.	안전성 검토 완료

- 태양광 발전시설

심의 내용	조치사항
태양광 발전시설의 기둥부는 자연친화적인 재료와 색상(기와진회색 등)으로 적용하고, 관련 부대시설은 트랠리스 등으로 차폐할 것.	· 태양광 기둥은 기와진회색으로 적용 · 차폐용 트랠리스 설치 H2.0mxL2.44m
태양광 발전판넬 하부를 그대로 노출시키지 말고 판넬의 기능유지 및 관리에 지장이 없는 범위내에서 목재 등을 활용한 조형적인 처리를 하므로써 태양광 발전시설과 하부 휴게공간 사이에 이질감을 발생되지 않도록 할 것.	공사시 태양광 시설의 기능 및 현장여건을 고려하여 쾌적한 휴식공간 조성 예정
우리시 도시계획 조례에 의거하여 개발행위 허가를 득할 것. (녹색에너지과 요청사항)	개발행위 절차 진행 예정

□ 향후 계획

○ 태양광 발전시설 공사발주시 심의 결과 반영

○ 설계심의 결과보고서 작성하여 조경과에 통보

○ 계약부서(공원운영과)에 준공 통보 및 준공처리

□ 향후 추진 일정

○ 2016. 7.        : 공사 발주

○ 2016. 8. ~ 10. : 공사 시행

○ 2016. 11.       : 관리기관 시설물 인계