문서번호	치수과-2061
결재일자	2016.6.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
김동식		신용철	06/24 박상돈
협조

현안사항 실정보고

- 한강준설(저수로, 취수장) 정비공사 -

2016. 6

현안사항 실정보고

- 한강준설(저수로, 취수장) 정비공사 -

Ⅰ		공사내용

❍ 공사기간 : ’16.4.1~ ’16.11.30

❍ 공 사 비 : 3,187만원

❍ 사업규모 :

- 저수로 준설 106,000㎥, 취수장 준설 14,400㎥

- 준설토 반출 120,400㎥

❍ 시 공 사 : 관악산업 주식회사

❍ 감 리 사 : 주식회사 대한콘설탄트

Ⅱ		감리단 보고내용

□ 관련근거

❍ 대콘한강 제16-12(2016.06.10)

□ 보고내용

❍ 사토장(저수로 L=21.50㎞, 취수장 L=53.01㎞)

- 경기도 김포시 누산리 일원

공 종	단위	잔토(사토)량			비고
		설계량	반출량	잔량
저수로 준설토 반출	㎥	106,000	106,000	-
취수장 준설토 반출	㎥	14,400	14,400	-
계	㎥	120,400	120,400	-

❍ 현재 설계 반영되어 있는 사토장은 폐기물 무단반입 및 비산먼지 민원발생 등으로 사용이 정지되어, 새로운 대상지를 책임건설사업관리자 현장확인 및 적정성을 검토하여 변경선정코자 함

□ 검토내용

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
운반위치	김포시 누산리 일대	통진읍 가현리 일원 외 1	-
운반거리	L=21.50㎞(저수로) L=53.01㎞(취수장)	L=22.95㎞(저수로) L=54.31㎞(취수장)	L=1.45㎞ L=1.30㎞
운반단가	D/T24ton:7,315원/㎥ D/T24ton:13,142원/㎥	D/T24ton:7,516원/㎥ D/T24ton:13,477원/㎥	201원/㎥ 335원/㎥
기타검토	- 변경사토장이 설계된 사토장보다 운반거리는 증가하였으나 운반 속도가 증가하여 운반단가 증가액이 미미함 ⇒ 결론 : 공사비 조정없이 적용

Ⅲ		공사비 비교표

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증⦁감	비 고
사토운반공
운 반 비(저수로)	775,390	775,390	-
운 반 비(취수장)	189,244	189,244	-

Ⅳ		조치의견

❍ 책임 건설사업관리 보고 내용과 같이 준설토의 원활한 반출을 위해 사토장을 변경 승인하고, 기 설계된 사토장에 비해 운반거리 및 속도 증가로 단가는 증가 하였으나, 공사금액(계약금액) 증가가 미미하여 조정(변경)없이 적용코자 함.