함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	설계변경에 따른 변경계약 의뢰(대현산배수지(1-3)지 내부 방수방식공사)

1. 이준016-57(2016.06.21.) 및 급수운영과-15142(2016.06.23.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행하고 있는『대현산배수지(1-3지)내부 방수ㆍ방식공사』와 관련하여 아래와 같이 설계변경(1회)을 시행하고 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 대현산배수지(1-3지)내부 방수ㆍ방식공사

나. 공사기간 : 2015. 12. 09. ~ 2016. 06. 30.

다. 도 급 비 : 645,715천원

라. 시 공 사 : 솔바로건설(주) 대표 한훈하

마. 감 리 사 : ㈜이준엔지니어링 대표 나석근

바. 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 기타교체비

- 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비, 시설비

사. 도급비 변경

(단위 : 원)

구 분		도 급 비		증·감	비 고
		당 초	변 경
총부기금액		645,714,800	612,907,500	감32,807,300
도급비	공급가액	587,013,455	557,188,637	감29,824,818
	부가세	58,701,345	55,718,863	감2,982,482

아. 변경사유

- 현장 여건변화에 따른 공법변경 및 물량 증ㆍ감

- 각종 보험료 정산

따로붙임 1. 설계변경 시행방침 1부.

2. 설계변경 검토보고서 1부.

3. 사업관리기술자 검토보고 1부.

4. 설계변경 내역서 1부.

5. 합의각서 1부.

6. 설계변경 심의위원회 개최결과 보고 1부.

7. 설계변경 사전심의 의결서 1부.

8. 설계변경 심의 개최공문 1부.

9. 설계변경 심의 의뢰서 1부. 끝.

	동부수도사업소장
주무관	김찬오		급수설비팀장	배성호		급수운영과장	전결 06/24 오기석
협조자	주무관	노은영
시행	급수운영과-15266	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-772-7211	/전송	02)3146-2789	/	kco0178@seoul.go.kr	/	부분공개(7)