함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(2015년 성북구관내 시설공사 및 급수공사 건설폐기물 처리용역)(2차,최종)

1. 우리사업소에서 시행중인 『2015년 성북구관내 시설공사 및 급수공사 건설폐기물 처리용역(장기계속단가계약)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(2차,최종)을 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 2015년 성북구관내 시설공사 및 급수공사 건설폐기물 처리용역

나. 도 급 자 : **************

다. 용역기간 : 2016.01.01~2016.6.30(총부기기한:2015.05.11~2016.06.30)

라. 설계변경내용 : 성북구관내 시설공사 및 급수공사 건설폐기물 물량 증감

마. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,급수공사비,신설공사비

상수도사업비용,영업비용,급수공사비,개조공사비

자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비

상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선교체비

구 분		당 초	변 경	비고(증․감)
도급액 (VAT포함)	총 부기금액	77,633,000	76,912,200	감)720,800
	금차 금액	24,978,000	24,257,200	감)720,800

바. 설계변경 내역                                             (단위 : 원)

붙 임 : 1. 설계변경 심의위원회 개최결과보고 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.

주무관	유형근		주무관	유명수		시설관리과장	이승철		중부수도사업소장	06/24 유경애
협조자	★주무관	은정호
시행	시설관리과-18997	(		)	접수		(		)
우	04605	서울시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-2205	/전송	3146-2239	/	bandyyhk@seoul.go.kr	/	부분공개(5)