문서번호	급수운영과-12603
결재일자	2016.6.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
이보민		06/24 조상덕
협 조

급수공사 부분완료 처리보고 (신설40)

2016. 06.

급수공사 부분완료처리 보고

1. 현    황

○ 공사위치 : 강남구 대치*********

○ 작업지시 : 신설 40

○ 공사개요 : 공동신규(주계량기 40mm*1개, 세대계량기 15mm*12개소)

○ 공사기간 : 2016.05.20.~2016.06.30.(1회연기처리)

2. 보 고 내 용

○ 상기 위치 공사현장은 주계량기는 설치하였으나 건축공사 일정 차질로 벽체계량기 함 설치가 안되어 세대별 계량기는 미설치 하였음.

○ 벽체계량기함 설치시까지 2~3개월의 기간이 소요될것으로 판단되는바, 기설치한 주계량기에 대한 부분은 요금과로 개전통보하여 계량기 관리코자 하며, 벽체계량기함 설치완료 후 세대별 계량기를 설치하여 함.

3. 조치의견

○ 신설40번은 기설치한 주계량기로 준공처리하며,

○ 벽쳬계량함 설치완료 후 급수공사 재접수하여 세대별 계량기 설치.

○ 공사비는 기납부하였으므로 추가 급수공사비는 미부과처리.  끝.