투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	교통안전표지 작업지시(1차) 설계변경 통보

1. 2016년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가) 1차 작업지시 내역중 설계변경 사항이 발생되어 조치하였음을 통보하오니 공사 및 감리업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공사명 : ‘16년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가)

나. 도급자 : 천년스텐㈜ 대표 양동석

다. 설계변경 내용

- 신호 및 노면도색 등 선행공사 지연에 따른 작업불가 내역 제외

- 자치구 관할도로 구간 공사제외

첨 부 : 작업지시(1차) 변경내역 1부. 끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
수신자	(주)천년스텐,(주)건영이앤씨
주무관	장병준		기전과장	06/24 양영민
협조자
시행	기전과-6767	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203(상암동 835)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8406	/전송	02-300-8410	/	hijun39@seoul.go.kr	/	대시민공개