투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	시설보수과장
(경유)
제 목	변경계약(공사) 체결 안내-중랑천 상류 차집관거 성능개선공사 건설폐기물 용역

시설보수과-3005(2016.06.23)호와 관련하여 아래와 같이 변경계약을 체결되었음을 알리오니, 감독업무에 만전을 기하시기 바랍니다.

1. 계약건명 : 중랑천 상류 차집관거 성능개선공사 건설폐기물 용역

2. 계약총액 : 금77,888,000원(금칠천칠백팔십팔만팔천원)

3. 계 약 일 : 2015년  06월 23일

4. 변경내역

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
기한변경	2016.06.25	2016.12.25	증) 6개월

5. 계약사유 : 절대공기 부족

6. 계약업체 : 삼흥산업개발(주) (대표:염태욱)

**********57-8417)

붙임 : 용역변경계약체결 통보서 1부.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
★주무관	정상진		관리과장	한병연		중랑물재생센터소장	06/24 이성재
협조자
시행	관리과-7920	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64	/	http://env.seoul.go.kr/water
전화	02-2211-2522	/전송	02-2211-2529	/	jungsj0318@seoul.go.kr	/	부분공개(6)