문서번호	기전과-6099
결재일자	2016.6.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
박정민		06/24 이영목
협 조
	주무관		권택준

교통안전시설물 원인자공사 준공확인 결과보고

2016. 6.

북부도로사업소

(기 전 과)

교통안전시설물 원인자공사 준공확인 결과보고

교통안전시설물 원인자부담공사(신호)『종로구 성균관로 91길 올림픽기념 국민생활관 주변 교통안전시설 설치공사』에 대해 감리사로 부터 준공요청이 접수되어 이를 검토하고 처리계획을 보고함.

관련근거

◯ 2016.05.12. 원인자부담공사(신호) 승인요청(관광체육과-9777호)

◯ 2016.05.17. 원인자부담공사 승인(기전과-4754호)

◯ 2016.05.26. 원인자부담공사(신호) 공기연장 승인요청(관광체육과-10968호)

◯ 2016.05.31. 원인자부담공사 공사(준공)기한 연장 승인(기전과-5263호)

◯ 2016.06.02. 원인자부담공사(신호) 현장실정보고(건영 원16-06-01호)

◯ 2016.06.12. 원인자부담공사(신호) 준공검수요청(건영 원16-06-06호)

◯ 2016.06.13. 원인자부담공사(신호) 준공 승인요청(관광체육과-12181호)

◯ 2016.06.15. 원인자부담공사 준공확인 입회 요청(기전과-5778호)

공사개요

◯ 공 사 명 : 교통안전시설물 원인자부담공사(신호)

◯ 공사기간 : 2016.05.17 ~ 2016.06.30

◯ 공사장소 : 종로구 성균관로 91길 올림픽기념 국민생활관 주변

◯ 원 인 자 : 종로구청 관광체육과

◯ 설계ㆍ감리ㆍ시공업체

구 분	설계업체	감리업체	시공업체	비 고
신 호	㈜건영이앤씨	㈜건영이앤씨	미래월드안전㈜

공사내용

◯ 제어기(소형) 1본(신설), 경보제어기 2EA(이설), 디자인지주 3본(신설), 지주(용융) 1본(이설), 신호등 3조(신설), 경보등 6조(이설), 보행, 잔여(숫자) 4조(신설), 보행자작동신호기 1set(신설)

점검내용

◯ 점  검  일 : 2016.06.20(월)

◯ 점  검  자 : 사업소 업무담당, 혜화경찰서 시설반장, 종로구청, 감리사, 시공사

◯ 점 검 결 과 : 설치기준에 적합하게 시공됨.

조치의견

◯ 교통안전시설물 원인자부담공사 준공확인 현장점검 결과 관련규정에 의거 적합하게 시공되어 준공처리하고 그 결과를 원인자 및 유관기관에 준공 확인 통보코자 함.

붙 임 :  1. 현장사진 1부.

2. 준공도서 1부(별도).  끝.