문서번호	방재시설부-9660
결재일자	2016.6.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		김인숙	06/24 임춘근
협 조

경의선숲길 새창고개구간

파고라 이설 실정보고 검토

2016. 6.

도시기반시설본부

방재시설부

경의선숲길 새창고개구간

파고라 이설 실정보고 검토

경의선숲길 새창고개구간 파고라 이설에 대한 실정보고 검토 보고임.

▶ 경의경춘(감)2016-316(2016.6.22.)호

1		추진근거

○ 다산콜센터 민원 접수 (20160516002825, 20160518003571)

→ 파고라 내부 의자를 이용하는 이용자가 많아 소음이 심하고 주택 내부가 보여           사생활 침해로 생활에 많은 불편이 있으므로 파고라 이설 요청

○ 경의선숲길 현장 점검 관련 합동회의 개최

- 일시 : 2016.6.10.(금) 14:00~16:00

- 장소 : 푸른도시국 회의실

- 참석자 : 공원조성과장, 공원녹지정책팀장, 공원관리팀장, 공원개발팀장, 공원시설과장               서부공원녹지사업소 공원운영과장 및 시설과장, 감리단장, 현장소장

- 회의안건 : 경의선숲길 현장 점검 시 민원 및 보완사항 처리 방안 논의

2		새창고개 구간 파고라 이설 검토

○ 합동회의 관련 보완 요청 사항

- 새창고개구간 파고라 설치와 관련하여 파고라 맞은편 주택으로부터 사생활 침해에      대한 민원이 지속적으로 제기되고 있으며 민원에 대한 내용이 타당하므로 파고라 및      등의자 이설에 대하여 검토 할 것.

○ 검토 의견

- 발주처,감리단, 시공사 현장 협의 결과 : 파고라 7칸 전체를 효창공원역앞 공원                                          입구로 이설함이 타당.

○ 이설 계획

○   수량 증·감 현황

구 분	규격	단위	당초	변 경	증 감	비 고
조경공사						파고라 이설로 인한 등의자 7개는 서부공원녹지사업소로 이관
1) 시설물공
파고라 이설	H3000×2500×22000	개소	-	1	증) 1

○ 공사비 증·감 현황

구 분	공 사 비			비 고
	당 초	변 경	증 감
조경공사
1) 시설물공
파고라 이설		12,271,079	증) 12,271,079
순 공 사 비		12,271,079	증) 12,271,079
제 경 비		5,658,921	증) 5,658,921	부가세포하
도급공사비		17,930,000	증) 17,930,000

3		건설사업관리기술단 검토의견

○ 주민민원과 현장여건을 고려하여 발주처와 현장 협의하에 파고라 이설 검토     하였으며,

○ 파고라 이설공사는 공사 장비의 진입이 어려운 현장여건과 시공 및 품질 등을     고려하여 산출된 공사비는 적정하다고 판단됨.

4		보고자 의견

○ 경의선숲길 민원접수 및 현장점검 관련 합동회의 시 보완요청사항인 파고라     이설검토에 대한 건설사업관리기술단의 검토의견이 타당하여 승인 통보코자     하며 차후 설계변경 시 반영토록 조치코자 함.

붙 임 : 건설사업관리기술단 실정보고 1부.  끝.