문서번호	시설과-4755
결재일자	2016.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
조경팀장		시설과장	중부공원녹지사업소장
남상국		김한준	06/27 이용태
협조

남산 회현자락 한양도성 보존.정비 및 공원조성공사

실정보고 사항 검토보고

2016. 6

중부공원녹지사업소

(시 설 과)

남산 회현자락 한양도성 보존.정비 및 공원조성공사

실정보고 사항 검토보고

남산 회현자락 한양도성 보존.정비 및 공원조성공사 책임감리로부터 철거공사 수량변경 실정사항이 접수되어 검토 보고드림.

[관련공문 : 남산회현-109호 (2016.6.24.)]

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 남산 회현자락 한양도성 보존.정비 및 공원조성공사(2차)

○ 공사기간 : 2016. 1. 1. ~ 2016. 9. 30

○ 도 급 액 : 947,650천원

○ 도 급 자 : 동림건설(주) 대표 김기유

□ 검토내용 (책임감리)

구 분	현황 및 문제점	검 토 의 견	비 고 (순공사비)
토공사	▷ 구조물 철거 수량 추가 발생 ⁃ 변압기 구조물 철거 ⁃ 변압기 앞 옹벽 철거 ⁃ 분수대 기계실 운영 중단에 따른 기계실 구조물 철거 ⁃ 데크 철거 물량 중복 반영 ※ 철거수량 : 679.03㎡→946.86㎡	▷ 구조물 철거 수량 추가 반영 ⁃ 변압기 구조물 철거 증) 209.7㎥ ⁃ 옹벽 구조물 철거 증) 9.75㎥ ⁃ 기계실 구조물 철거 증) 76.24㎥ ⁃ 중복 물량 조정 감) 27.86㎥ ※ 철거수량 증가 : 267.83㎡	증) 10,373
토공사	▷ 콘크리트 포장 깨기 수량 변경 ⁃ 분수대 주변 콘크리트 포장깨기 면적 증가 및 누락 ⁃ 신궁옹벽 석축 콘크리트(뒷채움부) 물량 누락	▷ 콘크리트 포장 깨기 수량 변경 ⁃ 763.61㎥ → 1,030.31㎥ (증 266.7㎥) ⁃ 뒷채움부 누락분 반영 증) 99.23㎥	증) 7,374
토공사	▷ 석축헐기 물량 누락 ⁃ 주차장 옆 석축헐기 내역서 물량 누락	▷ 석축헐기 누락 물량 반영 ⁃ 394.62㎥ → 470.32㎥ (증 75.7㎥)	증) 4,266
토공사	▷ 폐기물 상차 수량 변경 ⁃ 철거공사 변경에 의한 폐기물 상차 수량 변경	▷ 폐기물 상차 수량 변경 ⁃ 2,564.78㎥ → 3,219.66㎥ (증 654.88㎥)	증) 1,709

□ 공사비 변경 (철거공사)

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증. 감	비 고
도급비	직접공사비	70,620	94,342	23,722
	제경비	30,640	39,010	8,370
	공급가액	101,261	133,353	32,092
	부가가치세	10,126	13,335	3,209
	합계	111,387	146,688	35,301

□ 검토의견

○ 분수대 가동 중단에 따른 변압기 구조물 철거, 지하 기계실 철거, 분수대 주변 지하 콘크리트 구조물 및 신궁옹벽 뒷채움부 철거물량 누락분 반영, 주차장 옆 데크 철저물량 중복에 따른 조정 등 현장 실정에 맞게 적정하게 검토된 사항으로

○ 책임감리 실정보고 사항에 대해 승인처리하고, 향후 설계변경 시행 등 공사시공에 철저를 기하도록 조치코자 함

붙 임 : 1. 실정사항 검토 공문 1부.

2. 변경내역서, 도면, 산출기초 등 각 1부.  끝.