과 장		06/27 代채재일			팀장		채재일		심사자	김철수		설계자			이생기		설 계			심 사				결 재
																	2016년 6월 일			2016년 6월 일
변 경 설 계 서 (1차)
	설계서 : 2016년 창신동 등 10개동 상수도공사-설계변경 (1차)
	구 분								당 초				변 경					증 ․ 감				비 고
	총 공 사 비								642,931,990				642,931,990
	공사비			공 급 가 액					584,483,628				584,483,628
				부 가 가 치 세					58,448,362				58,448,362
				계					642,931,990				642,931,990
	공사개요		관 경					당 초						변 경					증 ․ 감				비 고
			D=13~50mm					L = 881m						L = 880m
			D = 80mm					L = 44m						L = 44m
			D = 100mm					L = 76m						L = 76m
			D = 150mm					L = 181m						L = 219m
			D = 200mm					L = 292m						L = 292m
			D = 250mm					L = 3m						L = 3m
			D = 300mm					L = 68m						L = 68m
			D=13~300mm					L = 1,545m						L = 1,582m					L = 37m

붙  임 : 변경설계서 1부.  끝.