투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(준공기한 연기 통보)

1. 천호수 제2016-271호 (2016.6.24.)와 관련입니다.

2. 공사추진중 유관기관별 시설물 추가설치요청 및 인수인계 협의 지연에 따라 당초 공사기한내 준공이 불가함에 따라 준공기한을 아래와 같이 연기통보하오니 공사관리에 만전을 기하여 주시기 바라며

3. 시설공사, 폐기물처리용역, 책임건설사업관리기술용역에 대하여 관련자료를 첨부하여 2016. 6. 28한 준공기한 연장 요청하시기 바랍니다.

□ 준공기한 변경 : 기존 `16.6.30 → 변경 `16.8.30 (2개월 연장)

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 관련 방침 1부. 끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							김상도			광역도로과장					전결 06/27 진재섭
협조자
시행			토목부-13073									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2558						/전송			02-3708-2599					/	ironksd@seoul.go.kr												/	부분공개(5)