문서번호	급수운영과-12694
결재일자	2016.6.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
차승현		06/27 조상덕
협 조
	주무관		윤복철
	주무관		이재윤
	주무관		이승우
	주무관		박홍선

설계변경(2차) 심의위원회 의견서

『2015년 2차 압구정동외 6개동 상수도공사』

2016. 06.

강남수도사업소

(급수운영과)

설계변경 심의 의견서(2차-최종)

심의 의원회 의견

○  공 사 명  :  2015년 2차 압구정동외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 심의일시 : 2016. 06. 27(월), 오전 10 : 30

○ 심의장소 : 강남수도사업소 4층(급수운영과)

○ 심의의견 : 설계변경(2차-최종) 심의 의견을 아래와 같이 제시함

구 분	직 위	심의내용 및 결과		성 명	비고
		심의항목	심의결과
위원장	급수운영과장	물량변동 적정성	이견없음	조상덕
		제경비 적정산정
		신규공정 적정성
위 원	급수운영과 시설6급	물량변동 적정성	타당함	이승우
		제경비 적정산정
		신규공정 적정성
위 원	시설관리과 시설6급	물량변동 적정성	적정함	이재윤
		제경비 적정산정
		신규공정 적정성
위 원	시설관리과 시설6급	물량변동 적정성	타당함	윤복철
		제경비 적정산정
		신규공정 적정성
위 원	급수운영과 시설7급	물량변동 적정성	적정함	박홍선
		제경비 적정산정
		신규공정 적정성

신청부서명	급수운영과
작 성 자	차승현
제출년월일	2016. 06. 27

설계변경(2차) 요약 보고

「2015년 2차 압구정동외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)」에 대하여 신규공정 및 물량변경 사항이 발생하여 아래와 같이 심의내용 보고

□ 공 사 명 : 2015년 2차 압구정동외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)

❍ 공사개요 : D=13~300mm, L=816m

❍ 계약기간 : 2015.12.29 ~ 2016.06.30

❍ 도 급 비 : *************

❍ 도 급 자 : 주식회사 가나실업 대표 신정윤

□ 변경사유

❍ 시공물량 증ㆍ감에 따른 계약물량 조정

- 물량증가 : 아스팔트 포장절단(100~150mm) 공정 등 152개 공정

- 물량감소 : 투수성 아스콘 포장절단(100~150mm) 공정 등 282개 공정

❍ 신규공정에 따른 계약물량 조정

- 신규공정 : 단수천공 분기점분기(야간,지세, 80×13~20mm) 등 3개 공정

□ 설계변경 내역                                       (단위 : 원)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증ㆍ감
도 급 비	***********	***********	***********
공 급 가 액	***********	***********	***********
부가 가치세	**********	**********	*********

붙임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.