문서번호	건축부-8242
결재일자	2016.6.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★전문관		건축관리과장	건축부장
현승주		곽동호	06/27 안재혁
협 조
	실무사무관			정태명
	주무관			김재무
	주무관			양우창
	주무관			정찬교
	주무관			김승조

모두의 학교 리모델링공사 설계용역

설계 검토회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 6.

모두의 학교 리모델링공사 설계용역

설 계  검 토 회 의  결 과  보 고

우리 본부에서 추진중인『모두의 학교 리모델링공사』설계용역과 관련,전체(분야별) 검토회의를 개최하고 결과를 보고

사업개요

○ 사 업 명 : 모두의 학교 리모델링공사

○ 건축규모 : 지상4층, 연면적 2,458.25㎡(증축 포함)

○ 사업기간 : 2015.11. ~ 2017.6.

○ 설계기간 : 2016. 3. ~ 2016.8.

○ 사 업 비 : 총 4,997백만원(공사비 4,028, 설계관련 260, 감리비 등 709)

○ 설 계 자 : ㈜종합그룹환경건축사사무소

○ 현 공 정 : 기본설계 중

회의개요

○ 일    시 : 2016.6.24.(금) 14:00

○ 장    소 : 도시기반시설본부 건축부 회의실

○ 참 석 자 : 건축부 건축관리과장, 평생교육담당관 실무사무관(담당),

분야별 감독관, 분야별 설계자

○ 회의내용 : 전체(분야별) 설계용역에 대한 설계도서 검토 및 협의사항 논의

주요 회의결과

○ 기획부서(평생교육담당관)

- 시민마당, 주차장, 모두의 숲 부분은 후속사업에서 지하주차장, 증축           등으로 이용될 수 있으므로 토지활용계획 고려

- 1층 시민소통광장에 전시를 할 수 있도록 조명설치

○ 운영기관(서울평생교육진흥원)

- 시민플랫폼을 시민소통광장으로 확장하여 방재실 벽면과 일치시키고         시민소통광장은 3개 실로 분할(폴딩도어)

- 2층 휴게실과 복도 사이 벽을 개방감 있는 것으로 변경

- 2층 운영사무실과 다목적홀 사이에 출입문(방화문) 설치

- 3층 세미나실을 도란마당으로 붙여 복도의 개방감 확보

- 3층 작업/실습실과 4층 그룹스터디룸 복도 사이 벽을 개방할 수 있도록         폴딩도어 등으로 설치

○ 건축분야

- 2층 실내조경 공간 구성을 위해 바닥 구조체 설치

- 철판 구조보강을 하는 부분은 내화뿜칠 등으로 내화성능 확보

- 각 층 화장실에 설비 배관 등을 설치하기 위하여 남자화장실 세면대 1개를         없애고 파이프 닥트 추가설치

○ 토목분야

- 기존 배수관로 등을 도면화하여 관리

○ 조경분야

- 후속사업의 토지활용계획을 고려하여 시민소통광장의 마감재 재검토

- 모두의 숲과 옥외 데크가 단절되지 않도록 데크 주변에 벤치 설치

○ 기계분야

- 후속사업의 토지활용계획을 고려하여 시민소통광장, 주차장, 모두의 숲에         지열 천공을 회피하여 계획

- 시험천공에 소요되는 비용은 설계용역비에 반영하여 처리

- 소방법 등 관련법령에 따라 옥내소화전 설치계획 반영

○ 전기분야

- 태양광설비는 남측 옥탑층에만 설치(공사비 관련 삭제 고려)

- 각 층 화장실에 전기 샤프트 설치

○ 인증분야

- BF인증 관련하여 인증기관과 사전협의한 결과 현장 여건상(장애인 화장실         폭 2.1m확보, 일반화장실 통로 1.4m 회전반경 확보 등) 최우수등급         획득이 어렵다는 답변을 받아 향후 인증과정에서 등급하향 될 수 있음

○ 기타

- 6월 초 경관심의 접수 준비 중 독산동 지역주민들 민원 관계로 평면확정을         하지 못하여 경관심의 접수를 중단하였고 분야별 설계작업 또한 지연된         실정으로 건축인허가, BF인증 등의 소요기간 문제로 8월 26일 설계준공에         차질이 발생할 것으로 예상되어 1개월 용역기간 연장 필요

행정사항

○ 분야별 해당사항 통보
- 평생교육담당관 : 평면결정 지연 등으로 인한 설계용역기간 1개월 연장(사업기간 포함)

- 건축부 : 용역기간 및 용역비 변경계약 검토

- 설비부, 방재시설부, 설계자 : 회의결과를 설계에 반영하여 설계추진
○ 검토회의에 소요된 제반비용 지출 : 금267,640원

- 예산과목 : 평생교육담당관, 다양한 평생교육환경 조성. 평생교육사업                    효율적 추진, 모두의 학교 설립 운영, 시설부대비

향후계획

○ 2016. 7월 : 실시설계 진행
○ 2016. 8월 : 계약심사 및 설계용역 준공(1개월 연장 가능)

붙임 : 회의자료, 참석조서, 지출 영수증 등 각 1부.  끝.