서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(창신·숭인지역 도로개설 타당성조사 용역)

우리과에서 시행 중인「창신·숭인지역 도로개설 타당성조사 용역」에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명: 창신·숭인지역 도로개설 타당성조사 용역

나. 계약자: ㈜동일기술공사

다. 준공기한 연기내역

- 당 초: 2016. 7. 2

- 변 경: 2016. 9. 2

라. 귀책소재: 서울특별시

마. 연기사유: 주민설명회 개최를 통한 의견수렴을 위해 준공기한 연기

붙 임 : 1. 준공기한 연기 의뢰서.

2. 준공기한 연기 보고.

3. 합의각서.  끝.

	도로계획과장
주무관	박종찬		도로시설계획팀장	한정무		도로계획과장	06/27 하종현
협조자
시행	도로계획과-8833	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개