문서번호	급수운영과-12738
결재일자	2016.6.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강남수도사업소장
차승현		조상덕	06/27 정경효
협 조

설계변경(2차-최종) 보고 (2015년 2차 압구정동외 6개동 상수도공사)

2016년  6월

강남수도사업소

(급수운영과)

설계변경(2차-최종) 보고

(2015년 2차 압구정동외 6개동 상수도공사)

우리사업소가 시행 중인 “2015년 2차 압구정동외 6개동 상수도공사”의 신규공종 발생 및 계약물량 증․감에 따른 설계변경(2차) 사항이 있어 다음과 같이 보고합니다.

□  현 황

□ 공 사 명 : 2015년 2차 압구정동외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)

*** *************************

*** *********************************

*** ************************

**  ********

*** **********

*******************************************************************

구 분	당초금액	변경금액	증․ 감
***	***********	***********	***********
****	***********	***********	***********
*****	**********	**********	*********

** ****

*****************************************

*** *************

구 분	공 정	단위	당초	변경	증 ․ 감
토 공	아스팔트 포장절단(100~150mm)	m	960	1,257	증)297
부설공	스텐레스관 부설공(13~50mm)	m	468	431	감) 37
	주철직관 부설공(80~300mm)	m	348	157	감)191
구조물공	밸브실 설치공(80~300mm)	개소	28	7	감) 21

*** *******************

공 정	내 용
단수천공 분기점분기(80×연결관 13~20mm)	낙찰율86.747%적용
단수천공 분기점분기(80×연결관 40~50mm)	“
주철직관 부설공(야간, 지세, 80mm)	“
주철관 철거공(야간, 지세, 80mm)	“

□ 주요공정 검토현황

구 분	검토 내용	검토결과
토 공	아스팔트 포장절단(100~150mm)외 64종	이상없음
부설공	스테인레스관 부설공(20mm)외 224종	이상없음
구조물공	원형밸브실 설치공(기초재생PE)외 21종	이상없음
부대공	콘테이너형 가설사무실외 53종	이상없음
사급자재	주름마디 스테인레스강관외 107종	이상없음
포장공	콘크리트 인력비빔타설외 4종	이상없음
제잡비	제잡비의 요율 적용여부	이상없음

□ 공종별 증․감 내역

(단위 : 원)

구 분	공 종	당 초	변 경	증․ 감
*	***	***********	***********	***********
*	****	**********	**********	************
*	***	**********	**********	***********
*	****	**********	*********	************
*	***	**********	**********	***********
*	****	**********	**********	***********
*	***	*********	*********	*********
*	***	***********	***********	***********

□  조치 의견

□ 상기 보고내용에 의거 설계변경(2차)을 시행하고 본청 재무과에 계약변경 의뢰하고자 합니다.

붙임 : 1. 설계변경 심의위원회 의견서 각 1부.

2. 설계변경 내역서(2차) 1부.  끝.