투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	준공기한 연기의뢰(경의선숲길 공원조성공사(2단계) 건설폐기물 처리용역)

우리 본부에서 시행중인 『경의선숲길 공원조성공사(2단계) 건설폐기물 처리용역』의

총차 및 금회2차 계약분에 대한 준공기한을 아래와 같이 연기의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 경의선숲길 공원조성공사(2단계) 건설폐기물 처리용역

나. 용 역 비 : 386,696천원(2차분 : 212,302천원)

다. 도 급 자 : ******************

라. 준공기한 연기내역

구분	당 초	변 경	비고
총차	2013.10.12.~2016.06.30	2013.10.12.~2016.07.31	(증) 31일
2차	2014.12.22.~2016.06.30	2014.12.22.~2016.07.31	(증) 31일

- 연기에 따른 귀책사유 : 서울특별시 도시기반시설본부

- 지체상금부과여부 : 미부과

마. 연기사유 : 경의선숲길 공원조성공사의 준공기한 연기를 감안하여 공사 중 발생                           되는 건설폐기물의 원활한 처리를 위해 폐기물처리용역 준공기한 연기

붙임 :  1. 준공기한 연기검토보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박계현		공원시설과장	김인숙		방재시설부장	06/27 임춘근
협조자	계약2팀장	홍연화
시행	방재시설부-9786	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 14층 방재시설부	/
전화	3708-8684	/전송	3708-8756	/		/	부분공개(6)