문서번호	급수운영과-11878
결재일자	2016.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	급수운영과장	강동수도사업소장
김종수	전명수	06/27 김명용
협 조
	주무관	김용현

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

「2016년 강동수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사(장기계속)」 설계변경(제 1회) 시행 계획 보고

2016. 06.

강동수도사업소

(급수운영과)

「「2016년 강동수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사(장기계속)」

설계변경(제 1회) 시행 계획 보고

「2016년 강동수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사(장기계속)」에 대하여 시공 물량 증․감으로 인하여 다음과 같이 설계변경 시행코자 함

□ 공사 현황

□ 공 사 명 : 2016년 강동수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사(장기계속)

□ 공사개요 : 아스팔트포장 183a, 콘크리트 6a, 보도블록 24a(변경없음)

□ 계약기간 : 2016. 05. 02. ~ 2017. 04. 30

□ 도 급 자 : 주영종합건설주식회사   대표  임병배

□ 도 급 비 : 2,043,932,000원

□ 보고 내용

□ 설계변경 사유 : 시공물량 증․감

- 시공물량 (증.감)현황

구분	규격	당초	변경	비 고
보조기층재(소운반)	2.5DT (적치장→현장)	1,566㎥	200㎥	감)1,366
보조기층재(소운반)	4.5DT (적치장→현장)	755㎥	2,843㎥	증)2,088

- 계약금액 변경 내역 : 변경없음

구 분	당 초	변 경	증․감	비고
도 급 비	2,043,932,000	2,043,932,000	-	-

□ 조치 의견

□ 상기와 같이 시공 물량 증․감 사항이 발생되어 설계변경 시행하고 본청 재무과에 설계변경 계약의뢰하고자 함

첨부 : 설계변경내역서 1부. 끝.