투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	923공구 책임감리원
(경유)
제목	923공구 본선환기구(937E2)덕트 위치 변경 승인 통보

1. 동명감923 제2016-151(‘16.06.13)호와 관련입니다.

2.『지하철9호선 3단계 923공구 건설공사』본선환기구(937E2)덕트 위치 변경 요청건에 대하여 귀 감리단 의견으로 승인 하오니,

3. 본선환기구(937E2)덕트 구조물 위치 변경에 따른 추가 공사비는 입찰안내서(제3장 계약조건, Ⅶ.계약금액조정, 2.대형공사의 설계변경으로 인한 계약금액조정, 마.항)규정에 따라 조치하고 시공시 품질 및 안전관리에 철저를 기하시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	엄상민		토목1과장	代김용선		도시철도토목부장	06/27 김진팔
협조자	주무관	김용선
시행	도시철도토목부-8074	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8 프리미어플레이스9층	/
전화	772-7214	/전송	772-7306	/		/	대시민공개