	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	여직원 대기실 등 재배치 및 청사보수전기공사 설계변경 계약결과 보고

1. 관련근거

가. 지방계약법 시행령 제74조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

나. 소방행정과-9283(2016. 6. 27.)호 『구로소방서 여직원 대기실 등 재배치 및 청사보수전기공사 설계변경 계약요청』

2. 위와 관련 우리서 여직원 대기실 등 재배치 및 청사보수보강 진행 현장여건 변동과 설계 누락 및 현장대응단 사용부서의 요구사항 등에 대하여 지방계약법 시행령 제74조 근거에 의거 변경계약체결 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 계약건명 : 구로소방서 여직원 대기실 재배치 및 청사보수전기공사

나. 계약기간 : 2016. 5. 26. ~ 2016. 7. 14.(계약기간 변동 없음)

다. 설계변경 계약금액 내역

구 분	변 경 내 용			비 고
	변 경 전	변 경 후	증 ․ 감
전기공사	21,222,420원	26,176,990원	4,954,570원	부가세 등 간접비포함 및 낙찰율 87.745%적용

라. 설계변경 내용 : 붙임 설계변경 사유서 참조

마. 계약보증금 : 3,183,360 + 743,190 = 금3,926,550원

붙임 1. 변경전·후 계약서 사본 1부.

2. 설계변경 사유서 1부.

3. 계약내역서 부.

4. 청렴이행서약서 각 1부.

5. 계약보증서 1부.  끝.

담당자	김현태		장비회계팀장	천완주		소방행정과장	윤봉수		소방서장	06/27 代윤봉수
협조자
시행	소방행정과-9314	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 소방행정과	/
전화	2618-3103	/전송	2616-1919	/	act02@seoul.go.kr	/	대시민공개