문서번호	시설보수과-2390
결재일자	2016.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
최태석		박춘배	06/27 이종엽
협 조

감독기관의 검토보고서 제출에 대한 검토결과 보고

[시조사삼거리 교차로구간 개선공사]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 6.

성동도로사업소

(시설보수과)

감독기관의 검토보고서 제출에 대한 검토결과 보고

[시조사삼거리 교차로구간 개선공사]

‘시조사삼거리 교차로구간 개선공사’를 수행함에 있어 현황 및 문제점에 대한 감독기관의 검토보고서 제출에 따른 검토 보고임

Ⅰ		공 사 현 황

공 사 명 : 시조사삼거리 교차로구간 개선(청량제1고가 성능개선 포함) 공사

공사기간 : 2014.12.18.~2016.09.30.

도 급 비 : 3,688,190,000원

도 급 자 : ㈜특수건설  대표 김중헌

공사개요 : 차도확장 – B=3.0m, L=306m

(고가차도 성능개선 1개소, 보도육교 철거 1개소 포함)

Ⅱ		현황 및 문제점

청량제1고가 단계별 시공에 따른 슬래브 시공이음 발생

- 당초 교통처리를 위하여 단계별로 시공하게 되어 있고, 단계별 시공시 1차분 슬래브 일부(B=50cm)를 깨고 신.구 슬래브 접합토록 되어 있음

- 슬래브 깨기로 인한 차로 감소(4차포⇒3차로)로 교통정체에 따른 민원발생 및 콘크리트 잔재 낙하로 인한 안전사고 발생 가능

Ⅲ		감독기관 검토의견

현장여건을 감안하여 설계자 의견을 검토한 바, 시민불편 최소화 및 안전사고 예방을 위하여 철근이음은 커플러에 의한 기계적이음으로 시공하고, 구조물의 장기 내구성 확보에 문제가 없도록 품질기준을 만족하는 제품으로 시공

개략공사비 : 약 9,696천원 증

Ⅳ		조 치 계 획

상기와 같이 공사 감독기관의 검토보고 사항에 대하여 검토한 바, 시민불편 및 안전사고 예방과 현장여건을 감안한 공법으로 감독기관의 검토의견과 같이 반영하는 것이 타당하다고 판단됨

다만, 구조물의 장기 내구성 확보에 문제가 없도록 철근의 기계적이음(커플러) 품질기준과 피복기준을 만족하도록 시공 조치하고, 연결부 콘크리트의 양생 후 강도발현시까지 진동의 영향을 최소화 할 수 있도록 시공관리에 만전을 기하여야 할 것이며,

공사비 증액은 금년도에 기확보한 예산범위 내에서 집행이 가능한 바, 예산 현황 및 설계변경 증·감사항 등에 대하여 종합적으로 검토 후 시행토록 조치하고, 공사비는 실 시공물량에 맞춰 정산 설계변경을 시행하고자 함.

붙임  감독기관 검토보고 및 관련 공문 1부. 끝.