문서번호	백제학연구소-974
결재일자	2016.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		백제학연구소장	한성백제박물관장
강현정		김지연	06/27 이인숙
협 조
	총무과장			이상진
	주무관			이영경
	주무관			박중균

'2016년 한성백제박물관 몽촌토성 발굴조사 현장인부 공급용역' 산출내역서 변경 시행

2016. 6.

백제학연구소

'2016년 한성백제박물관 몽촌토성 발굴조사

현장인부 공급용역' 산출내역서 변경 시행

‘2016년 한성백제박물관 몽촌토성 발굴조사 현장인부 공급용역’과 관련하여 산출내역서 일부를 조정하여 당초 계획된 발굴조사 업무를 차질 없이 완료하고자 함.

Ⅰ		변경 내역

❍ 사업비: 금 247,985,940원(계약금액 변동 없음)

❍ 변경 사항: 산출내역서 내역

❍ 변경 내역

- 현장조사 일수(품수)

- 국민 연금

- 일반관리비 및 이윤 요율

Ⅱ		변경 세부 사항

❍ 기본급의 현장조사 일수(품수): 150일 → 180일로 수정, 명시

- 산출내역서와 과업지시서의 내용이 상이

※ 산출내역서 - 주휴수당 포함 150일,

과업지시서 - 현장실조사일수 150일

❍ 국민 연금: 13,285,063원 → 내역에서 삭제

-  현장 인부 중 해당자(60세 미만의 근로자) 없음

❍ 일반관리비 및 이윤 요율

: 일반관리비 (5.0%→3.62%), 이윤(10.0%→7.0%)

- 계약자와 서울시 재무과와의 계약 체결 시 제출한 산출내역서

요율 변경, 시행

Ⅲ		변경 후 조치 사항

❍ 변경 조치된 산출내역서에 따라 향후 사업을 시행

- 발굴조사 현장 인건비는 변경된 내역서에 의거, 지급

❍ 당초의 산출내역서에 의해 지급된 인부임은 관련 근거에

의거하여 반환 조치(3, 4월분)

	<관련근거>
[ 2016년 한성백제박물관 몽촌토성 발굴조사 현장인부 공급용역 과업지시서- 4. 계약일반조건] 자. 한성백제박물관은 계약상대자가 제출한 청구서의 전부 또는 일부가 부당함을 발견할 때에는 그 사유를 명시하여 즉시 당해 서류를 반송할 수 있으며 이 경우 재청구 하여야 한다. 지급 분이 있는 경우 계약상대자는 이를 즉시 반환하여야 한다.

붙임: 1. 서울시 재무과 제출용 산출내역서

2. 한성백제박물관  제출용 산출내역서

(현장인부 인건비 청구시 산출내역서).  끝