투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경 계약의뢰[도심권 50+캠퍼스 및 복지타운조성 통신공사]

우리 본부에서 시행중인『도심권 50+캠퍼스 및 복지타운조성 통신공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 도심권 50+캠퍼스 및 복지타운조성 통신공사

나. 계 약 자 : ㈜엘리시스 대표 이시정

다. 공사기간 : 2015. 11. 27. ~ 2016. 10. 20.

라. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		계 약 금 액			계약기간
		변경 전	변경 후	증·감	변경 전	변경 후
통신 공사	총차	800,252,820	770,759,000	감)29,493,820	‘15.11.27~ ‘16.10.20	‘15.11.27~ ‘16.11.14
	1차	100,000,000	100,000,000	-	‘15.11.27~ ‘16.06.30	‘15.11.27~ ‘16.06.30
	2차	700,252,820	670,759,000	감)29,493,820	‘16.4.15~ ‘16.10.20	‘16.4.15~ ‘16.11.14

마. 예산과목 : 인생이모작지원과, 은퇴후 제2인생설계지원, 50+캠퍼스확충, 시설비

붙임 : 1. 설계변경보고서 및 합의서 각 1부.

2. 변경내역서 및 제비율 검증표 각 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	신정규		녹색성장과장	김창균		설비부장	전결 06/21 권오식
협조자	계약1팀장	김점선
시행	설비부-9721	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8640	/전송	02-3708-8659	/		/	대시민공개