문서번호	기전과-6238
결재일자	2016.6.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
박정민		06/28 이영목
협 조
	주무관		백윤광

『2016년 교통신호기 설치 및 보수공사(연간-2구역) 제2차작업지시』

실정보고 검토 및 조치계획 보고

2016. 6.

북부도로사업소

(기 전 과)

『2016년 교통신호기 설치 및 보수공사(연간-2구역) 제2차 작업지시』

실정보고 검토 및 조치계획 보고

2016년 교통신호기 설치 및 보수공사(연간-2구역) 제2차 작업 추진중 책임감리사(건영이앤씨)로부터 현장실정에 따른 실정보고서가 접수되어 이를 검토하고 조치계획을 보고함

□ 관련근거

○ 2016. 6.  8. 2016년 교통신호기 설치 및 보수공사(연간-2구역) 제2차 작업지시

○ 2016. 6. 27. 제2차 작업지시 실정보고서 제출(건영이앤씨)

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 2016년 교통신호기 설치 및 보수공사(연간-2구역)

○ 공사기간 : 2016. 03. 15. ~ 2016. 12. 31.

○ 시공업체 : ㈜벧엘정보통신 대표 채수진

○ 계약금액 : 금385,307,000원

□ 제2차 작업지시 내용

○ 작업기간 : 2016. 06. 08. ~ 2016. 07. 08.

○ 작업대상 : 노원구 중계동 503-3(중계역)외 4건

○ 작업금액 : 금181,283천원

연번	교차로명 및 구분	현황 및 문제점	감리사 검토의견	비고 (개략)
1	건강보험료 연금보험료 노인요양보험료	○ 추후 최종 설계변경시 정산 예정	○ 설계금액을 감액 후 증빙자료에 의한 최종 설계변경시 정산	감 5,165,444
2	산업안전 보건비	○ 추후 최종 설계변경시 정산예정	○ 설계금액을 감액 후 증빙자료에 의한 최종 설계변경시 정산	감 2,042,907

□ 감리사 현장실정보고 내용 및 검토의견                 (단위:원)

연번	교차로명 및 구분	현황 및 문제점	감리사 검토의견	비고 (개략)
3	전기안전수수료 음향신호기 기능검사비	○ 각종수수료 발생	○ 증빙자료에 의한 최종 설계변경시 반영	-
4	간접비 (제경비, 일반관리비, 이윤 등)	○ 상기 1항~3항에 의한 금액변동으로 간접비 차액 발생	○ 간접비 정산	감 2,457,649
합 계			감 9,666,000

□ 작업지시 변경금액                                (단위:원)

구분	변경 전	변경 후	증 ․ 감	비고
공급가액	164,802,727	156,015,455	8,787,272(감)
부가가치세	16,480,273	15,601,545	878,728(감)
합 계	181,283,000	171,617,000	9,666,000(감)

□ 보고자 의견

○ 책임감리사(건영이앤씨)로부터 접수된 실정보고에 대해 검토한 결과 현장여건에 맞게 변경하여 위와 같이 시공토록 승인하고 작업을 추진토록 하고자 함.

붙 임 :  제2차 감리사 실정보고  1부.  끝.