문서번호	기전과-6243
결재일자	2016.6.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		기전과장
백윤광		06/28 이영목
협 조
	주무관		박정민

『2016년 교통신호기 설치 및 보수공사(1구역) 제2차 작업지시』

실정보고 검토 및 조치계획 보고

2016. 6

북부도로사업소

(기전과)

『2016년 교통신호기 설치 및 보수공사(1구역) 제2차 작업지시』

실정보고 검토 및 조치계획 보고

2016년 교통신호기 설치 및 보수공사(연간-1구역) 제2차 작업 추진 중 책임감리사(건영이앤씨)로부터 현장실정에 따른 실정보고서가 접수되어 이를 검토하고 조치계획을 보고함

□ 관련 근거

○ 2016. 6. 10. 2016년 교통신호기 설치 및 보수공사(연간-1구역) 제2차 작업지시

○ 2015. 6. 27. 제2차 작업지시 실정보고서 제출(건영이앤씨)

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 2016년 교통신호기 설치 및 보수공사(연간단가-1구역)

○ 공사기간 : 2016. 3. 15. ~ 2016. 12. 31.

○ 시공업체 : (주)스타엘브이에스 대표 이준수

○ 공사금액 : 금384,276,850원

□ 제1차 작업지시 내용

○ 작업기간 : 2016. 06. 13. ~ 2016. 07. 12.

○ 작업대상 : 종로구 진안빌라 외 53건

○ 작업금액 : 금164,179천원

□ 감리사 현장실정보고 내용 및 검토의견                 (단위:원)

연번	교차로명	현황 및 문제점	감리사 검토의견	비고 (개략)
1	건강보험료 연금보험료 노인요양보험료	○ 추후 최종 설계변경시 정산 예정	○ 설계금액을 감액후 증빙자료에 의한 최종 설계변경시 정산	감 1,177,726

연번	교차로명 및 구분	현황 및 문제점	감리사 검토의견	비고 (개략)
2	산업안전 보건관리비	○ 추후 최종 설계변경시 정산 예정	○ 설계금액을 감액후 증빙자료에 의한 최종 설계변경시 정산	감 2,241,533
3	전기안전수수료 음향신호기 기능검사비	○ 각종수수료 발생	○ 증빙자료에 의한 최종 설계변경시 반영	-
4	간접비 (제경비, 일반관리비, 이윤 등)	○ 상기 1~3항에 의한 금액변동으로 간접비 차액 발생	○ 간접비 정산	감 1,165,741
합 계			감 4,585,000

□ 작업지시 변경금액                                (단위:원)

구분	변경 전	변경 후	증 ․ 감	비고
공급가액	149,253,637	145,085,455	4,168,182(감)
부가가치세	14,925,363	14,508,545	416,818(감)
합 계	164,179,000	159,594,000	4,585,000(감)

□ 보고자 의견

○ 책임감리사(건영이앤씨)로부터 접수된 실정보고에 대해 검토한 결과 현장여건에 맞게 변경하여 위와 같이 시공토록 승인하고 작업을 추진토록 하고자 함.

붙 임 :  제2차 감리사 실정보고  1부.  끝.