서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰 요청(도심보행길 시범구간 안내표지판, BI노면표지)

1. 보행자전거과- 9031호(2016.6.27.) 관련입니다.

2. 우리 부서에서 발주한「도심보행길 시범구간 안내표지판, BI 노면표지 제작 및 설치」의 계약내용을 아래와 같이 변경하고자 하오니 처리해 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

1) 용 역 명 : 도심보행길 시범구간 안내표지판, 노면표지 등 제작 및 설치

2) 용역기간 : 2016.5.24. ~ 2016.6.30.

3) 용역업체 : ㈜삼우아트

4) 계약금액 : 115,994,790(금일억일천오백구십구만사천칠백구십원)

나. 변경내용 :

계약기간변경	당 초	2016.5.24. ~ 2016.6.30.
	변경후	2016.5.24. ~ 2016.7.14.

※ 계약금액은 변경없음

다. 계약기간 연장 사유

- 추가 검토, 표지판 내용 일부변경 등으로 인한 기간 소요

붙임 : 1. 도심보행길 시범구간 안내표지판, BI 노면표지 제작 및 설치 계약 변경 계획 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	보행자전거과장
주무관	이명주		보행정책팀장	김현중		보행자전거과장	06/28 이방일
협조자
시행	보행자전거과-9055	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	02-2133-2427	/전송		/		/	대시민공개