문서번호	기전과-4903
결재일자	2016.6.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	기전과장
차준원	문준호	06/28 박심근
협 조
	주무관		이명호
	주무관		황준석

2016년 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)』

1차 작업지시 감리 실정보고 검토보고

2016. 6

성동도로사업소

(기 전 과)

『2016년 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)』

1차 작업지시 감리 실정보고 검토보고

2016년 교통신호기 신설 및 개량공사 중 작업기간 연장 관련 감리 실정보고가 접수되어 관련 서류 및 현장 확인후 그 결과를 보고합니다.

□ 관련근거

○ ㈜건영이앤씨 건영 본16-06-14호(2016.06.22)

-  작업기한 연장 실정보고서 제출

○ 동대문구청 도로과-7225호(2016.06.07)

- 교통안전시설(신호기) 이설 협조 요청

□ 공사개요

공 사 명	2016년 교통신호기 신설 및 개량공사
도 급 자	㈜거승이엔씨 대표 김주완
도 급 비	금283,323,800원
공사기간	2016.03.17 ~2016.12.31
감 리 원	㈜건영이앤씨 책임감리원 조순재

□ 감리원 검토의견

○ 연기요청내용

구 분	당초 작업기간	변경 작업기간	사 유
1차 작업지시	2016.03.25~2016.06.30	2016.03.25~2016.08.30	토목 공사 지연

○ 공사기간 연장 관련 검토내용

- 이문초등학교 보도블럭 확장에 따라 교통신호기를 이설해야 하나 유관기관(동대문구청) 토목공정 지연으로 인하여 교통신호기 신설 및 개량공사 1차 작업지시 공사기간 연장이 필요함.

□ 보고자 의견

○ 동대문구청 도로과-7225호(2016.06.07)와 관련하여 이문초등학교 앞 보행환경개선사업(보도블럭 토목공사)이 방학기간중 공사계획에 따라 1차 작업지시 기간내 시공이 불가하여,

○ 교통신호기 신설 및 개량공사-1차 작업지시 공사기간을 토목 완료 기간인 8월 30일까지 연기하여 공사추진에 철저를 기하고자 합니다.

붙     임 : 감리실정보고 1부. 끝.