문서번호	시설보수과-5314
결재일자	2016.6.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설보수과장	강서도로사업소장
유태용	代유태용	06/28 신현태
협 조

『안양교』정밀점검 시행 검토보고

2016. 6

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

강서도로사업소

(시설보수과)

『안양교』정밀점검 시행 검토보고

‘16년 정밀점검 대상 시설인 “안양교”는 현재 성능개선공사가 추진중에 있어 정밀점검을 “보류”하였으나, 동 시설물에 대한 정밀점검 시행여부 검토보고임.

Ⅰ		안양교 제원

시 설 명	종별	상태 등급	위 치	규 모		설계 하중	교량형식	준공일	시공사
				폭	연장
안 양 교	2종	C	구로구 구로동682 ～ 광명시 철산동 산1	22	266	DB18	PSCI	‘77.07.30	신흥건설

Ⅱ		최근 진단 및 정밀점검 실시현황

구 분	점검기간	시행사	점검결과 주요내용	비고
정밀안전진단 (긴급)	‘06.12.22 ~‘07.03.22	㈜코램건설	ㆍ교대, 교각 철근노출, 슬래브 열화 등	C등급
정밀점검	′09.11.25 ~′09.11.25	자체	ㆍ정밀안전진단 실시후 성능개선공사를 위한 실시설계용역 시행
정밀점검	′10.03.26 ~′10.07.23	㈜엠디비산업	ㆍ장기사용에 따른 교량 노후화
정밀점검	′12.04.18 ~′12.10.14	(재)한국건설 안전기술원	ㆍ바닥판 하면일부 백태 등
정밀점검	′14.05.02 ~′14.09.28	(재)건인씨앤알	ㆍ바닥판 열화 및 노후
정밀점검 (계획)	2016년	미정	ㆍ점검비: 26,400천원

Ⅲ		광복교~안양교 도로확장공사 추진

사업개요

○ 위    치 : 광명시 철산동 ~ 구로구 구로동 구로IC

○ 규    모 : 도로확장 B=23.75~27.0m, L=1.11㎞

- 광복교 보도설치, 안양교 철거 및 신설(아치교)

○ 사업기간 :  ‘12. 6 ~ ’19. 9(설계기간 : ‘12.6.5 ~ ’15.2.28)

- 착공 : ‘16. 4. 1

○ 총사업비 : 83,284백만원

○ 시 공 사 : ㈜KCC건설

○ 시행기관 : 서울시 도시기반시설본부 토목부

안양교 성능개선공사 추진

○ “안양교”에 대한 2006년 실시한 정밀안전진단 결과(C등급) 교량 장기간    사용에 따른 노후화에 따라 상기공사 구간에 포함하여 성능개선공사(전면철거 후    재가설, DB18→DB24)를 추진중에 있음

Ⅳ		검토결과

정밀점검 및 정밀안전진단 실시 주기

○ 관련규정 : 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조제1항 및 제9조제2항

○ 실시 주기

안전등급	정밀점검		정밀안전진단
	건축물	그 외 시설물
A등급	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상	6년에 1회 이상
BㆍC등급	3년에 1회 이상	2년에 1회 이상	5년에 1회 이상
DㆍE등급	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상	4년에 1회 이상

※ 단, 증축, 개축 및 리모델링 등을 위하여 공사 중이거나 철거예정인 시설          물로서, 사용되지 아니하는 시설물에 대해서는 국토교통부장관과 협의하여          안전점검 및 정밀안전진단의 실시를 생략하거나 그 시기를 조정할 수 있다.

“안양교” 정밀점검 시행여부 검토

○ 이전의 정밀점검시행 기준(완료)일 : 2014.9.28

○ 정밀점검을 생략할 수 있는 경우(시특법)

- 증축, 개축 및 리모델링 등을 위하여 공사 중이거나 철거예정인 시설             물로서, 사용되지 아니하는 시설물에 대해서는 국토교통부장관과 협의            하여 안전점검 및 정밀안전진단의 실시를 생략하거나 그 시기를 조정할            수 있다. (기준일 2016.9.28)

○ 2016년 “안양교” 성능개선공사 추진계획

- 공사기간 : ‘16. 4. 1 ~ ’19. 9. 12

- 현재는 공사를 위한 하천점용허가 협의중임 ⇒ 서울지방국토관리청

- 가교설치(계획) : ‘16. 10 ~ ’16. 12.

○ “안양교” 정밀점검 시행검토

- “정밀점검을 생략 또는 시기 조정을 위하여는 ‘16.9.28일(이전 정밀점검후             2년 도래일)에 사용중에 있지 않는 시설물” 인 경우에 가능하나, “안양교”            ’16년 가교설치 후 ’17년 교량 철거가 계획되어 있음

- 따라서, ‘16년도 안양교는 사용중에 있는 시설물로 2016년도 정밀점검은            정상적으로 추진되어야 할 것으로 판단됨

Ⅵ		조치의견

○ 상기 검토의견과 같이 “안양교”는 이전 정밀점검 후 2년 도래일인           ‘16.9.28일까지 계속하여 사용중에 있을 것으로 예상되는 바, ’16년 정밀     점검은 정상적으로 시행하고자 함.

○ 추진계획

- 2016. 06. 30 : 용역 발주

- 2016. 11. 20 : 용역준공

따로붙임  1. 공사착공 공문 1부.

2. 광복교~안양교 도로확장공사 추진계획서 1부.   끝.