서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	SH공사사장(택지계획부장, 택지조성부장, 기계공사부장)
(경유)
제목	은평뉴타운 부분준공 및 시설물 인수 인계 조속 시행 요청

1.  택지계획부-1128호(2016.3.28.)와 관련입니다.

2.  귀 공사에서 사업시행중인 은평뉴타운 도시개발사업 부분준공과 관련하여 당초 공사완료보고서 제출(2016.5월중) 및 공사준공 예정일(2016.5.31.)이 초과 되는 등 부분준공이 지연되고 있는 바, 해당 지구에 대한 지적확정측량 및 시설물 인수인계가 조속히 시행될 수 있도록 조치하여 주시기 바라며, 지연사유 및 향후 일정을 회신하여 주시기 바랍니다.

3.  아울러 우리시 도로시설과로부터 은평뉴타운 내 공동구에 대해 공동구 관리를 위한 제반사항(시의회 동의 및 관리인력 확보 등)을 완료한 상태이나, 환경플랜트(소각시설, 수송관로 등) 시설에 대해 은평구와 SH공사간 인수·인계 지연으로, 공동구 안전 및 분담금(전기,통신,상수도,쓰레기수송관로 등) 관리에 막대한 차질이 발생되고 있다고 하니,

4.  귀 공사에서는 조속히 인수·인계가 마무리 될 수 있도록 적극 조치하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	장길홍		주거사업총괄팀장	차창훈		주거사업과장	06/28 신중수
협조자
시행	주거사업과-7526	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21 (무교동) 더익스체인지빌딩 4층 주거사업과	/
전화	02-2133-7217	/전송	02-2133-0754	/	jgh2000@seoul.go.kr	/	대시민공개