투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	준공기한 연기의뢰(남부순환로~오정대로간 도로개설공사)

우리부에서 시행중인 『남부순환로~오정대로 삼거리간 도로개설공사』에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요

- 공 사 명 : 남부순환로~오정대로 삼거리간 도로개설공사

- 도 급 비 : 12,781,000,000원(4차 7,419,000,000원)

- 시 공 사 : (주)보훈종합건설

나. 준공기한 연기

구 분		공사기간
		당 초	변 경	증
전체	공사기간	`10.09.29~`16.06.30 (2,102일)	`10.09.29~`16.08.30 (2,163일)	(증) 61일
4차	공사기간	`15.03.04~`16.06.30. (485일)	`15.03.04~`16.08.30. (546일)	(증) 61일

다. 연기사유 : 별첨 의뢰서 참조

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 준공기한 연기조치 의뢰서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장),건설총괄부장
주무관	김상도		광역도로과장	진재섭		토목부장	06/28 代이동훈
협조자
시행	토목부-13244	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2558	/전송	02-3708-2599	/	ironksd@seoul.go.kr	/	부분공개(5)