문서번호	시설과-2483
결재일자	2016.6.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	조경시설팀장	시설과장	서부공원녹지사업소장
정순주	이용원	임병국	06/28 오진완
협 조
	★도로관리팀장		최연우

『남부도로사업소 공원 기본 및 실시설계 용역』

준공기한 연기 검토 보고

2016. 6

서부공원녹지사업소

( 시 설 과 )

『남부도로사업소 공원 기본 및 실시설계 용역』

준공기한 연기 검토 보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

금천구 소재 남부도로사업소 이전부지 인근에 소공원 조성을 위한「남부도로사업소공원(가칭) 기본 및 실시설계용역」준공기한을 다음과 같이 연기 하고자 함.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 남부도로사업소 공원(가칭)기본 및 실시설계용역

○ 위    치 : 금천구 시흥동 963-1외 일대

○ 용역기간 : 2015. 10. 6. ~ 6. 30

○ 용역개요 : 남부도로사업소 이전부지 인근 보상부지에 낡고 노후된 연립을 철거하여 공원 조성

○ 도 급 비 : 34,152,000원(변경없음) 서울시 도로관리과 재배정 예산

○ 도 급 자 : ㈜ 진우엔지니어링코리아 대표 양현

□ 사업추진현황

○ 2015. 10. 06. : 용역계약 및 착공

○ 2015. 11. 13. : 금천구청 사업설명회(남부도로사업소 및 강남순환고속도로 하부 관련 계획등)실시

○ 2016. 01. 28. : 실시계획인가 고시

○ 2016. 03. 04. : 토지분할 및 현황측량

○ 2016. 03. 31. : 실시계획인가(변경) 고시

○ 2016. 06. 02. : 공원조성계획(안)주민설명회 실시(시흥3동 사무소)

○ 2016. 06. 08. : 금천구청 사업설명회

※ 7월중 주민설명회 재실시 요청(금천구청)

□ 준공기한 연기검토

○ 준공기한

┌ 당 초 : 2015. 10. 06 ~ 2016. 06. 30

└ 변 경 : 2015. 10. 06 ~ 2016. 10. 30

○ 준공기한 연기 사유

- 소공원 조성에 따른 금천구의 주민의견 수렴 지연 및 공원조성계획 수립,

- 남북간도로 개설공사와 연계한 공원경계부분의 설계 협의 등 각종 절차 이행에 따른 절대공기 부족

- 도시계획사업 시행 된 소공원부지 건물 및 토지보상지연 등 본사업과 연계하여 추진하여야 하므로 공기절대부족 등

○ 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 서부공원녹지사업소

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 향후 추진일정

○ 2016. 06. 29 : 준공기한 연기

○ 2016. 07월 : 주민의견 수렴 및 관련부서 협의

○ 2016. 08 ~ 9 : 공원조성계획 수립

○ 2016. 10. 30. : 용역 준공.    끝.