함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 심의회 개최［2015년 도봉,노원구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사(장기계속단가계약)］ -설계변경(최종)

우리 사업소에서 시행중인 “2015년 도봉,노원구 관내 상수도시설물 및 보수공사(장기계속)”에 대하여 당초 계약물량 외 신규공종 발생 및 물량 증 ․ 감 사항이 있어 아래와 같이 설계변경 심의회를 개최코자 합니다.

가. 공사현황

○ 공 사 명 : 2015년 도봉,노원구 관내 상수도시설물 및 보수공사(장기계속)

○ 주요 변경물량

공종	규격	단위	단가	비고
타이튼 죠인트관 접합공	100mm(지세할증)	개소	9,436	HNB10102
플랜지철거공	250mm(지세할증)	개소	10,755	HNB402505
주름마디 스텐관 부설공	20mm(지세할증)	m	4,914	HNB40302
슬립인조인트 접합공	20mm(지세할증)	개소	4,367	HNB70102
단수천공 분기점분기	80×연결관25~30mm(지세할증)	개소	24,203	HN108232
단수천공 분기점분기	100×연결관13~20mm(지세할증)	개소	24,162	HN110122
분기점 새들분수전 잠금	25mm(지세할증)	개소	9,131	HN400250
주철직관 부설공	150mm(야간)	m	13,254	HNA10151
주철(이형관) 부설공	100mm(야간)	개소	13,408	HNA20101
주철(이형관) 부설공	150mm(야간)	개소	23,857	HNA20151
주철(이형관) 부설공	300mm(야간)	개소	22,249	HNA20301
K.P 죠인트관 접합공	150mm(야간)	개소	18,375	HNB12151
K.P 이탈방지압륜 접합	100mm(야간)	개소	16,544	HNB16101
K.P 이탈방지압륜 접합	150mm(야간)	개소	23,888	HNB16151
K.P 이탈방지압륜 접합	300mm(야간)	개소	50,522	HNB16301
K.P 이탈방지압륜 철거	100mm(야간)	개소	8,272	HNB17101
K.P 이탈방지압륜 철거	300mm(야간)	개소	25,261	HNB17301
주철관 절단공(절단기사용)	80mm(야간)	개소	41,462	HNB20081
주철관 절단공(절단기사용)	100mm(야간)	개소	44,402	HNB20101
주철관 절단공(절단기사용)	150mm(야간)	개소	47,356	HNB20151
주철관 절단공(절단기사용)	200mm(야간)	개소	53,230	HNB20201
주철관 절단공(절단기사용)	300mm(야간)	개소	62,055	HNB20301
플랜지접합공	400mm(야간)	개소	53,521	HNB30401
플랜지철거공	150mm(야간)	개소	13,204	HNB40151
플랜지철거공	400mm(야간)	개소	21,051	HNB40301
플랜지철거공	300mm(야간)	개소	26,759	HNB40401
제수밸브 부설 및 접합공	100mm(야간)	개소	51,034	HNB70101
제수밸브 부설 및 접합공	150mm(야간)	개소	65,191	HNB70151
제수밸브 부설 및 접합공	300mm(야간)	개소	128,113	HNB70301
원형밸브실 설치공(기초재생PE)	D=100mm(야간)	개소	385,771	HNK14101
원형밸브실 설치공(기초재생PE)	D=150mm(흄관h=1.66)(지세할증)	개소	377,450	HNK14152
원형밸브실 설치공(기초재생PE)	D=150mm(야간)	개소	388,575	HNK14151
원형밸브실 설치공(기초재생PE)	D=300mm(흄관h=1.66)(지세할증)	개소	385,623	HNK14302
원형밸브실 설치공(기초재생PE)	D=300mm(야간)	개소	396,748	HNK14301
철개고정장치 설치공	원형받침용(야간), 재료비별도	개소	52,268	HNT21121
철개고정장치 나사조임	D=80~300mm,(야간)	개당	4,283	HNT211101
구형밸브실 설치공	D=400mm(야간)	개소	2,086,780	HNK20401
밸브 개폐비	D=80~100mm(야간)	회	14,594	HZN57101
밸브 개폐비	D=300mm(야간)	회	26,020	HZN57301
밸브 개폐비	D=600mm	회	27,420	HZN57600
밸브 개폐비	D=600mm(야간)	회	51,412	HZN57601

○ 계약기간 : 2015.06.18 ~ 2016.06.30

○ 도급비 변경내역

- 당   초 : 금557,643,130원

- 변경 후 : 금557,295,000원 (감 348,130원)

○ 계약업체 : 산희건설㈜    대표 이종석

나. 심의회 개최

○ 심의일정 : 2016. 6. 28(화) 14:00

○ 심의장소 : 급수운영과

○ 심의위원장 : 급수운영과장

○ 심의의원 : 시설6급 이승완, 시설7급 강대유, 시설7급 유광창, 시설7급 이한수

다. 심의내용

○ 신규공종 및 계약물량 증․감에 대한 설계변경 사항

- 물량변동의 적정성 여부

- 계약 변동(증․감) 물량 계약단가 낙찰률 적용 적정여부

- 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

○ 위 사항을 검토 및 심의하고 심의 결과에 의거 설계변경 조치

따로붙임 :  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 심의신청서 1부.

3. 설계변경내역서 1부. 끝.

주무관	최용진		급수운영과장	06/28 이계환
협조자	주무관	강대유		주무관	유광창		지방시설사무관대우	이승완
주무관	이한수
시행	급수운영과-13622	(		)	접수		(		)
우	01137		/
전화	02-3146-3342	/전송	02-3146-3389	/		/	부분공개(7)