급수공사 공사기한 연기 보고

(노량진동 39-9)

주무관		시설관리팀장	시설관리과장			결재
전소영		고신석	06/28 우종근
협 조

명에 의하여 사당1동외 14개동 상수도공사 감독업무 수행 중 준공기한 연기 사유가 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

2016. 06. 28.

지방시설서기보 전소영

1. 준공기한 연기 및 작업지시 변경 대상

연번	위치	신청자	공사기간	작업지시번호	공사 개요	시공업체
1	노량진동 39-9	김경준	‘16.06.21.~ ’16.06.29.	개량-14	폐전	부경건설/ 부성이앤씨㈜

2. 준공기한 연기 및 작업지시 변경 사유

- 신축공사 현장의 자재적치(철판 등)로 인하여 수요가 원에 의거 준공기한 연기

※ 공사 연기원 접수 : 붙임 참조

3. 처리의견

상기 공사에 대하여 아래와 같이 준공기한을 변경하여 급수공사에 만전을 기하고자 합니다.

연번	위치	당초 공사기간	변경 공사기간	비 고
1	노량진동 39-9	‘16.06.21. ~ ’16.06.29.	‘16.06.21. ~ ’16.09.30.	-

붙임 : 공사연기원 1부.  끝.