문서번호	건축부-8005
결재일자	2016.6.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	건축관리과장	건축부장
김연석	곽동호	전결 06/22 안재혁

구리암사대교 도로관리 초소

실정보고에 대한 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  6

건축부

구리암사대교 도로관리 초소

실정보고에 대한 검토 보고

『구리암사대교 도로관리 초소 신축공사 』관련, 책임감리원으로

부터 제출된 실정보고에 대한 검토 보고

1. 공사개요

○ 공 사 명 : 구리암사대교 도로관리 초소

○ 대지위치 : 구리시 아천동 53-2외2필지

○ 규    모 : 지하0층/지상3층, 연면적 816.07㎡

○ 용    도 : 근린생활시설

○ 공사기간 : 2016.3.~2016.8.31.

○ 총공사비 : 1,910백만원(건축 902백만원)

○ 시 공 자 : 현대건설

○ 감 리 사 : 도화엔지니어링

2. 추진경위

○ 2016.03. : 공사착공

○ 2016.04. : 기초 공사

○ 2016. 06. 15 : 실정보고 신청

3. 실정보고

□ 주요내용 및 검토현황

연번	주 요 내 용	검 토 현 황	비 고
1	1층 지중보 구조형상 변경	1층바닥 흙 돠메우기 부분의 지중보 현상변경에 공사소요일수 10일 단축 효과

□ 설계변경시 공사금액 조정: 물량 및 공사비 증가 없음

4. 책임감리자 검토의견

○ 공기절감을 위하여 공사비 증감없이 1층 지중보의 단면현상을 소폭        변경하여 당초 설계의 구조안전성을 훼손치 않고 공기를 절약함이 타당함

5. 처리의견

○ 책임감리자의 검토의견이 적정한 것으로 판단되어 실정보고를 승인처리하고,       사업추진 관련부서(토목부)에 실정보고 승인사항을 통보하고자 함.

붙임 : 실정보고 관련서류 각 1부.  끝