투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약체결 - 2016년 고수호안 녹화사업 기본 및 실시설계 용역

1. 녹지관리과-2490(2016.6.16.)호와 관련입니다.

2. 「2016년 고수호안 녹화사업 기본 및 실시설계 용역」건에 대하여 다음과 같이 변경 계약을 체결하고자 합니다.

가. 계약현황

용 역 명	2016년 고수호안 녹화사업 기본 및 실시설계 용역
계약상대자	에이스톤엔지니어링(주) (대표 : 장명학)
계 약 금 액	금36,204,000원(금삼천육백이십만사천원)
계 약 일 자	2016.03.09.
공 사 기 간	2016.03.09. ~ 2016.06.17.

나. 변경내역 : 공사기간 변경(2016.03.09. ~ 2016.08.31.)

변 경 내 역	변경전	변경후
공 사 기 간	2016.03.09. ~ 2016.06.17.	2016.03.09. ~ 2016.08.31.

다. 변경사유

- 한강공원 고수호안 전체에 대한 기 녹화에 대한 현황분석 및 개선방향 검토

- 각 공원별(11개 공원) 특색(테마 부여)있는 녹화방안 검토에 따른 전문가 자문 시행

- 현장에 적용 가능한 식재기반 공법 및 관수시스템 추가 검토

- 수리검토, 점용허가 등 관련 법령 및 절차 검토

- 현장에 적용 가능한 식재기반 공법 및 관수시스템 추가 검토

- 시장단보고 시행 등

붙     임 : 1. 용역변경계약서 1부.

2. 계약의뢰 1부.

3. 계약보증서 1부.

4. 용역게약 조건 및 관련 예규 1부.  끝.

주무관	주홍열		총무과장	박병현		총무부장	06/29 代박병현
협조자
시행	총무과-11100	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/		/	부분공개(5)