문서번호	시설보수과-2426
결재일자	2016.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
최태석		박춘배	06/29 代박영종
협 조

감독기관의 검토보고서 제출에 대한 검토결과 보고

[시조사삼거리 교차로구간 개선공사]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 6.

성동도로사업소

(시설보수과)

감독기관의 검토보고서 제출에 대한 검토결과 보고

[시조사삼거리 교차로구간 개선공사]

‘시조사삼거리 교차로구간 개선공사’를 수행함에 있어 현황 및 문제점에 대한 감독기관의 검토보고서 제출에 따른 검토 보고임

Ⅰ		공 사 현 황

공 사 명 : 시조사삼거리 교차로구간 개선(청량제1고가 성능개선 포함) 공사

공사기간 : 2014.12.18.~2016.09.30.

도 급 비 : 3,688,190,000원

도 급 자 : ㈜특수건설  대표 김중헌

공사개요 : 차도확장 – B=3.0m, L=306m

(고가차도 성능개선 1개소, 보도육교 철거 1개소 포함)

Ⅱ		현황 및 감독기관 보고내용

청량제1고가 거더철거 및 설치 등으로 인한 보행자 안전도우미 운영

- 운영기간 : 2015. 5. 2 ~ 2016. 6. 10(기간중 41일)

- 운영인원 : 147명 781시간(주간 541시간, 야간 240시간)

* 2차분 임시 보행자 통로 설치 및 해체 등으로 1차분에 비해 인원 증가

- 운영결과 : 공사장 주변 주택가 및 상가 밀집지역으로 유동인구가 많아 보도우회 등 안내를 위한 보행자도우미 운영으로 시민불편 해소 및 민원저감

개략공사비 : 약 20,149천원 증

Ⅲ		조 치 계 획

상기와 같이 공사 현장여건상 시민불편 및 안전사고 예방과 민원발생을 최소화하기 위하여 보행자 도우미 운영이 필요한 사항으로 감독기관의 보고내용을 반영하는 것이 타당하다고 판단됨

다만, 공사비 증액은 금년도에 기확보한 예산범위 내에서 집행이 가능한 바, 예산 현황 및 설계변경 증·감사항 등에 대하여 종합적으로 검토 후 향후 보도공사 등에 추가 운영토록 조치하고, 공사비는 실 운영결과에 맞춰 정산 설계변경을 시행하고자 함.

붙임  감독기관 검토보고 및 관련 공문 1부. 끝.