투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	북부여성창업플라자 조성공사 설계용역 계약변경(용역기간 연장) 의뢰

1. 우리본부에서 시행중인 『북부여성창업플라자 조성공사 설계용역』과 관련하여 다음과 같이 계약변경(용역기간 연장)을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 북부여성창업플라자 조성공사 설계용역

나. 계 약 자 : ㈜건축사사무소 기오헌

다. 계약요청 내용 : 용역기간 연장(92일)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
계약금액	317,000,000원	317,000,000원	변경없음
용역기간	‘15.6.17 ~ ’16.6.30	‘15.6.17 ~ ’16.9.30	92일 연장

라. 연장사유 : 북부법조단지 마스터플랜에 수반되는 변경사항 반영을                               위한 설계변경 소요기간 필요

붙임 : 설계용역 기간연장 검토보고서 1부.  끝.

	건축부장
주무관	신효섭		건축관리과장	곽동호		건축부장	06/29 안재혁
협조자	경리과장	代김용범
시행	건축부-8420	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02)3708-2659	/		/	부분공개(5)