문서번호	시설과-4821
결재일자	2016.6.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		조경팀장	시설과장
김기수		남상국	06/29 김한준
협조

『낙산공원 재조성 기본계획 및 기본설계용역』

준공기한 연기 검토보고

2016. 6.

중부공원녹지사업소

(시설과)

『낙산공원 재조성 기본계획 및 기본설계용역』

준공기한 연기 검토보고

“낙산공원 재조성 기본계획 및 기본설계용역” 추진과 관련 市주거환경개선과에서 추진중인 용역과 연계하여 심의절차를 이행하고자 아래와  같이 용역 준공기한을 연기하고자 합니다.

※ 주거환경개선과-7157(2016.6.29.)호와 관련

용역개요

❍ 용 역 명 : 낙산공원 재조성 기본계획 및 기본설계용역

❍ 용역기간 : 2015.9.23. ~ 2016.6.30.

❍ 도 급 액 : 125,300,000원

❍ 도 급 자 : 안스디자인 대표 안영애

검토사항

❍ 용역 준공기한 연기사유

- 주거환경개선과에서 추진중인 “이화충신권 성곽마을 정비사업” 과

연계하여 한양도성도감 자문, 공원조성계획변경 등 각종절차 이행에

따른 용역기한 부족

(※ 이화충신권 성곽마을 정비용역 8월중 완료예정)

❍ 준공기한 연기

- 당초 : 2015. 9. 23. ~ 2016. 6. 30.

- 변경 : 2015. 9. 23. ~ 2016. 9. 30.

❍ 연기에 따른 귀책소재 : 중부공원녹지사업소

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

검토의견

❍ 낙산공원내 市주거환경개선과에서 추진중인 “이화충신권 성곽마을 정비사업”

용역과 연계하여 각종 심의절차 이행에 따라 불가피하게 용역 준공기한을

연기하여 추진에 만전을 다하고자 함.  끝.