투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	서울대공원 조절저수지 시설물 정비공사 설계변경(제2차) 의뢰

1. 시설과 – 4246호(2016. 06. 29)와 관련입니다.

2. 현재 진행중인『서울대공원 조절저수지 시설물 정비공사』에 대한 설계변경(제2차)을 아래와 같이 의뢰합니다.

□ 설계변경 (제2차)

가. 공 사 명 : 『서울대공원 조절저수지 시설물 정비공사』

나. 도급금액 : 금1,475,030,000원

다. 공사기간 : 2015. 10. 12. ~ 2016. 6. 30.

라. 계약업체 : 수자원기술개발㈜  대 표 김 완 규

마. 설계변경내용

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고 (증 · 감)
총 공 사 비	1,767,063,740	2,047,795,050	증 280,731,310
도 급 비	1,476,030,000	1,756,030,000	증 280,000,000
관 급 비	291,033,740	291,765,050	증 731,310

바. 사    유

- 안전시설(휀스, 사면보강) 및 관람시설(폭포) 등 신규 공종 발생에 따른 변경

- 주통관 보수․보강에 따른 신규 공종 발생에 따른 변경

사. 예산과목

- 동물사 관리기능 및 야생동물 종보전, 공원안전시설 보수 및 정비, 시설비,

조절저수지 시설물 정비 – 1,647,885,740원 (2015년 예산, 사고이월)

- 동물사 관리기능 및 야생동물 종보전, 공원안전시설 보수 및 정비

119,178,000원 (2015년 예산, 지출 완료)

- 동물사 관리기능 및 야생동물 종보전, 공원안전시설 보수 및 정비, 시설비,

야행관 시설개선 --------- 199,000,000원 (2016년 예산)

- 동물사 관리기능 및 야생동물 종보전, 공원안전시설 보수 및 정비, 시설비,

노후 우,오수관 개량공사 – 81,731,310원 (2016년 예산)

붙임 :  1. 설계변경 사유서 1부

2. 변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 설계변경 도서(도면별첨) 각1부.   끝.

	서울대공원장
주무관	손영민		주무관	한상길		시설과장	전결 06/29 공헌구
협조자
시행	시설과-4249	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	500-7441	/전송	507-7230	/	sonym6974@seoul.go.kr	/	부분공개(6)