투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	2015 한강스토리텔링사업 공사기간 변경에 따른 협조요청

1. 문화홍보과-2975(2014.10.8.)호,1573(2016.5.26.)호 및  1916(2016.6.24.)호 관련입니다.

2. 「2015년 한강스토리텔링 사업」관련, 준공기한 연장에 따른 공사기간 변경을 아래와 같이 알려드리니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

-       아     래      -

○ 사업개요

- 사 업 명 : 2015년 한강스토리텔링사업 조형물 및 공간조성

- 공사기간 :

당 초	변경 후
2016. 5. 27(금) ~ 6.30(목)	2016. 5. 27(금) ~ 7.12(화)

- 장    소 :강서한강공원(서울시 강서구 방화동 6-2번지)

- 내    용 :투금탄설화 관련 조형물 설치 및 데크설치 등 공간조성

○ 협조요청사항

- 조형물 설치 관련 주/야간 담당자 연락처 협조요청(비상연락망)

- 차량진입·설치 작업시간 및 차량이동시 동선 협조요청(차량무게 감안)

- 공사차량 및 관계차량 공사지역 주변 주차 협조(공원기획과 별도협조)

- 공사 중 주간/야간, 공사완료 후 야간 순찰강화 협조(안전사고 예방)

- 작업기간 현장발생 민원관련 및 안전사고 조치 관련 협조

붙임 : 1. 2015년 한강스토리텔링사업 기본계획 1부.

2. 한강스토리텔링사업 조형물 제작 및 공간조성 협조요청 1부.

3. 2015년 한강스토리텔링 사업용역 준공기한 재연장 1부.  끝.

	문화홍보과장
수신자	운영총괄과장,공원기획과장,강서안내센터장
★주무관	서정윤		문화홍보과장	06/29 김경원
협조자
시행	문화홍보과-2005	(		)	접수		(		)
우			/	http://hangang.seoul.go.kr/
전화	02-3780-0762	/전송	02-3780-0740	/		/	부분공개(5)