문서번호	시설관리과-17340
결재일자	2016.6.29.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
박행종		권승계	06/29 우종근
협조

설계변경 시행 심의결과 보고

(2015년 영등포구 및 동작구 상수도 단위공사장 건설폐기물 처리용역-최종)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 6

남부수도사업소

시설관리과

명에 의거 관내 「2015년 영등포구 및 동작구 상수도 단위공사장 건설폐기물처리용역(장기계속단가)」설계변경(제2회-최종)과 관련하여 아래와 같이 보고합니다.

2016. 6.

보고자 직급 : 지방시설주사보  성명 : 박행종

1. 용역현황

가. 용 역 명 : 2015년 영등포구 및 동작구 상수도 단위공사장

건설폐기물 처리용역(장기계속단가) -설계변경(제2회-최종)

나. 용역개요

- 폐기물운반 1,412 ㎥,  폐기물 처리 3,310 ton

다. 용역기간 : 2015. 07. 06 ~  2016. 06. 30

라. 총용역비 : 금28,813,000원

마. 수 급 자 : 문화기업㈜  대표 박해경

2. 설계변경 심의결과 : 적정함.(붙임문서 참조)

가. 심의일시 : 2016.06.28.(화) 16:00

나. 장    소 : 2층 회의실

다. 심의내용 : 설계변경 타당성, 적정성, 등

3. 보고내용

가. 설계변경(제2회-최종) 사유

- 현장 상태에 따른 계약물량 증·감으로 설계변경 사유 발생

- 총부기금액 : 당초 33,810,000원, 변경 28,813,000원(감4,997,000원)

나. 검토근거 : 공사계약 일반조건(현장 상태에 따른 설계변경)

다. 계약물량 변경내역

구분	당초 물량(㎥)			변경 물량(㎥)			증·감량(㎥)			비고
	계	1차수	2차수	계	1차수	2차수	계	1차수	2차수
계	1,373	1,056	317	1,412	1,056	356	39	-	39
폐아스콘	1,108	995	113	1,332	995	337	224	-	224
폐콘크리트	240	61	179	80	61	19	-160	-	-160
폐토사	25	0	25	0	0	0	-25	-	-25

라. 설계변경 내역

구분		계(총부기금액)		당초		변경
		당초	변경	1차수	2차수	1차수	2차수
용역비	계	33,810,000	28,813,000	21,597,000	12,213,000	21,597,000	7,216,000
	용역원가	30,736,364	26,193,637	19,633,637	11,102,727	19,633,637	6,560,000
	부가가치세	3,073,636	2,619,636	1,963,363	1,110,273	1,963,363	656,000

4. 조치의견

- 상기와 같이 계약금액변경 및 계약물량 증․감이 발생하여 붙임문서와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

따로붙임 : 1. 설계변경 사전심의 의결서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 합의서 1부.  끝.