함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	용역 변경계약 체결 통보[2015년 북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사 건설폐기물처리용역]

1. 시설관리과-13194(2016.6.29.)호와 관련입니다.

2. 『2015년 북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사 건설폐기물처리용역』건에 대하여 아래와 같이 변경계약을 체결하고 통보 합니다.

가. 건 명 : 2015년 북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사 건설폐기물처리용역

나. 계약상대자 : (주)신명

다. 계약 기간  : 2015.06.01. ~ 2016.06.30.

라. 계약 금액

- 당초 : 금차43,527,000원(총부기금액 :43,527,000원)

- 변경 : 금차49,676,000원(총부기금액 :49,676,000원)

- 증감 : 증6,149,000원

마. 변경사유

- 계약물량 증·감 사항 발생

따로붙임 : 1. 용역변경계약서 1부.

2. 합의서 1부.

3. 계약보증서 1부.  끝.

	행정지원과장
주무관	한경란		행정관리팀장	조기열		행정지원과장	06/29 정의석
협조자
시행	행정지원과-13732	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 북부수도사업소	/
전화	3146-3245	/전송	02-3146-3279	/	sobongh@seoul.go.kr	/	부분공개(7)